주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)-설계변경

□ 사업개요

위 치	5호선 군자역 1번 출입구, 마천역 내부(B1~4층), 7호선 먹골역 5번 출입구
공사개요	- 5호선 군자역 1번 출입구 E/S 2대, 마천역 내부(B1층-B4층) E/L 1대 - 7호선 먹골역 5번 출입구 E/S 2대
공사기간	’19.1.21 ~ ’21.2.25.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	132,211	천원
◦	심사금액	:	129,232	천원
◦	절 감 액	:	2,979	천원
◦	절 감 률	:	2.3	%

◦ 심사결과 통보

원안통과	수정	재검토
	○ (심사요청 내용을 수정하여 설계변경)

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,358원/L → 1,323.8원/L

- 경유 : 1,255원/L → 1,150원/L

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 소형공사안내판,PE휀스,라바콘걸이대,교통정리원,상수관보호(특수접윤) :

경비 항목으로 적용

- 철근콘크리트 파쇄(버스터) : 노무품 조정(품셈 공통 3-1-4)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인