주요 심사내용

□ 공 사 명 : 오류철도고가차도 보수공사

□ 사업개요

위 치	오류철도고가 보수공사
공사개요	교면방수 및 포장21.73a,신축이음보수158.9m, 강재바탕처리 및 도장2,037.8㎡
공사기간	2021.3. ~ 2021.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,788,512	천원
◦	심사금액	:	1,748,670	천원
◦	조 정 액	:	39,842	천원
◦	조 정 률	:	2.23	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정 :

- 보통철선(1.2mm) : 1,410원/kg → 1,080원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 산업안전보건비 산정오류 수정(기초금액 누락)(증3,601천원)

- 강관조립말비계 설치 및 해체품 조정(감34,928천원)

- 철도운행 안전관리자 작업시간 제한할증 제외(감57,417천원)

- 단면복구보수(t=10mm) 일위대가 수정(표준품셈6-8-5적용)(감7,623천원)

- 포장 장비운반 야간 능률저하 제외

- 가설사무실(창고)설치,철거 : 철거 품 조정(공통 2-3-2) (증 149천원)

- 전자인력관리시스템 단말기 임대료 추가(증1,600천원)

- 강재바탕처리(외부) 외 9종 보수물량 추가 반영(증65,753천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 선정위원회 개최

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)