주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한강대교 보수(도장)공사

□ 사업개요

위 치	한강대교(용산구 이촌동~동작구 본동)
공사개요	도장보수 11,744㎡
공사기간	’21.3. ~ ’21.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,528,000	천원
◦	심사금액	:	2,379,316	천원
◦	조 정 액	:	148,684	천원
◦	조 정 률	:	5.88	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 휘발유 외 4종

- 휘발유 : 1,313원/L → 1,368.1원/L (증 74천원)

- 경  유 : 1,161원/L → 1,189.8원/L (증 159천원)

- 보통철선(4mm) : 1,250원/kg → 920원/kg

- 라바콘 : 9,000원/개 → 5,200원/개

◦ 일위대가 조정 : 도장바탕처리 외 4개 공종

- 강재바탕처리(외부) : 노임 할증 제외 (감 43,804천원)

- 아치리브공중비계설치및철거 : 품 조정(서울형품셈) (증 2,030천원)

- 보호막, 가설방호벽, 가설사무소 : 경비 항목 적용

- 전기용접 : 특별인부 작업효율 적용 제외(기계 13-2-4) (감 462천원)

- 교통신호수,고소작업차 : 노임 할증 적용 제외(작업능률과 무관) (감 4,785천원)

◦ 제비율 조정

- 하도급대금지급보증서발급수수료 : 제외(전문공사)

- 고용개선지원비 : 보험료지원비 요율 7.835% → 7.93% (증 179천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)