주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2019년 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사(2권역)-설계변경

□ 사업개요

위 치	양천구 목1,4동, 신월동, 신정동 일원
공사개요	- 하수관로 전체교체 : D300~D1000mm, L=3,520m - 하수관로 부분교체 : D450~D600mm, 14개소 등
공사기간	’19.9.15 ~ ’21.1.16.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,168,156	천원
◦	심사금액	:	1,168,156	천원
◦	조 정 액	:	0	천원
◦	조 정 률	:	0.0	%

◦ 심사결과 통보

원안통과	수정	재검토
․ 심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	․ 심사요청 내용을 수정하여 설게변경	․ 설계변경에 대해 재검토 실시
○

□ 주요 심사내용

◦ 내역서 및 일위대가

- 금회 설계변경은 기존 공종의 물량 증감 발생으로 계약단가를 적용함(신규비목 없음)에 따라 조정사항 없음

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사제외