주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2021년 1종교량 일상유지보수공사(연간단가)-강북

□ 사업개요

위 치	강북지역 1종 교량
공사개요	아스팔트포장 및 교면방수 15a, 신축이음보수 49m, 콘크리트표면보수 875㎡, 기타 1식
공사기간	’21.1 ~ ’21.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,414,000	천원
◦	심사금액	:	1,374,993	천원
◦	조 정 액	:	39,007	천원
◦	조 정 률	:	2.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 휘발유 : 1,279원/L → 1,285원/L

- 경  유 : 1,103원/L → 1,109원/L

-	보통철선(4mm) : 1,150원/kg → 950원/kg

-	보통철선(1.2mm) : 1,280원/kg → 1,080원/kg

- 초속경시멘트 : 1,150원/kg → 850원/kg

- 각재(외송) : 44,753원/㎥ → 365,375원/㎥

- 합판(11.5×910×1820) : 16,000원/㎡ → 9,153원/㎡

- 산소 : 3.75원/L → 1.91원/L

- 스테인리스 강판(1.2mm) : 3,100원/kg → 3,085원/kg

- 스테인리스 강판(2mm) : 3,100원/kg → 2,985원/kg

- 스테인리스 강판(3mm) : 3,500원/kg → 2,985원/kg

- 에폭시주입제(건식저점도) : 18,000원/kg → 13,500원/kg

- 아세틸렌 : 13,000원/kg → 12,042원/kg

- 컨테이너(사무실용) : 2,600,000원/동 → 2,059,000원/동

- 컨테이너(창고용) : 2,300,000원/동 → 1,840,000원/동

- ㄷ형강 : 760원/kg → 700원/kg

- 연마지 : 230원/매 → 200원/매 등

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 절삭후아스팔트덧씌우기 : 지세(차로)할증 제외(품에 할증 포함) (감435천원)

- 사인보드, 비상대기 및 순찰 : 야간능률저하할증 제외(시간당 단가로 작업능률과 무관)

(감1,602천원)

- 폐기물운반 : 덤프운반 경비항목으로 조정 (감3,337천원)

- 배수로 제작 및 설치 : 협소할증 50%→10% 조정 (감28천원)

- 트럭크레인 : 경비항목으로 조정, 야간능률저하할증 제외(일당 단가로 작업능률과 무관) (감31,784천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사제외