주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구(설계변경)

□ 사업개요

위 치	동작대교 ~ 행주대교
공사개요	교면보수(아스팔트):45a, 교면방수:57a,신축이음보수:347m 표면보수:809㎡,단면보수:218㎡,균열보수:30m,강재보수:10m 도장보수공:20㎡,기타1식
공사기간	2022.01.07. ~ 2022.12.31

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	553,227	천원
◦	심사금액	:	552,343	천원
◦	조 정 액	:	884	천원
◦	조 정 률	:	0.16	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 강관배관 STS, D50 : 9,650원/m → 9,410원/m

- 곡관배관 STS, D50 : 10,613원/개 → 10,370원/개

- 고재처리(알루미늄) : -2,000원/kg → -2,550원/kg

- 고재처리(STS) : -2,000원/kg → -2,400원/kg

◦ 일위대가 조정

- 잡철물제작 공구손료 적용 오류 수정

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 물가변동은 심사 제외(별도 검토 후 시행)