주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울창업센터 동작 리모델링 (실내건축)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 동작구 노량진로 10, 스페이스살림 F존
공사개요	서울창업센터 동작 내부 리모델링 공사
공사기간	착수일로부터 50일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	681,847	천원
◦심사금액:	656,823	천원
◦조 정 액:	25,024	천원
◦조 정 률:	3.67	%

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 철강설(고철) 외 11종

- 철강설(고철): 375원/kg → 480원/kg (감279천원)

- 시멘트(40kg): 6,818.18원/포 → 6,091원/포 (감594천원)

◦ 일위대가 조정: 도배바름 외 12개 공종

- 도배바름(합판석고보드면,천장,방염벽지): 품셈 오류 조정 (감630천원)

- 벽체-3, 벽체-3A, 벽체-3-1, 벽체-3-2, 벽체-3-3: 서울형품셈 적용 (감1,163천원)

- SMC천정재철거: 품셈 오류 조정 (감979천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 요율 오류 조정 (1.89%+5,349천원 → 2.93%)

- 건설하도급대금지급보증서 발급수수료: 계상 제외

- 일반관리비:요율 오류 조정 (6.0% → 5.5%)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음