주요 심사내용

□ 공 사 명 : 남가좌3-3 소구역 하수관로 정비공사(2권역) 설계변경

□ 사업개요

위 치	서울시 서대문구 남가좌 1동 일대
공사개요	- 하수관로 전체교체 : D300~1,500㎜, L=2,315m - pc암거 개량 : 1.0m×1.0m, L=80m - 기타 부대공 1식
공사기간	2023.10.23.~ 2025. 12. 31.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	283,250	천원(증액)
○	심사금액	:	269,548	천원(증액)
○	절 감 액	:	13,702	천원
○	절 감 률	:	4.84	%

원안통과	수 정	재검토
∘심사요청 내용대로 설계변경(원안통과)	∘심사요청 내용을 수정 하여 설계변경	∘설계변경에 대해 재검토 실시
	⦿

□ 주요 심사내용(안)

○ 자재단가 조정: 치즐외 1종

치즐(0.7): 223,000원/EA→ 150,100원/EA

외송: 556,884원/㎥→ 500,661원/㎥A (감19천원)

○ 일위대가 등: 모르타르외 2종

- 콘크리트 포장(야간, 인력비빔): 인력품, 모래중복제외, 손료 제외

(표준품셈6-1-2)(감1,599천원)

- 콘크리트 구멍뚫기(D150/250): 일력품 및 장비 조정(서울형품셈24) (감4,403천원)

- 폐콘크리트 운반(현장→ 적치장) BH 0.2: 상차10분초과 재료비 공제(감210천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음