주요 심사내용

□ 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사 - 설계변경

□ 사업개요

위 치	서초구 서초동 269-4
공사개요	양재가압장 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프 교체 7대 송배수관부설 D=1,200~1,500㎜, L=535m
공사기간	2017. 12. 13. ~ 2021. 5. 30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	573,331	천원(증액)
○	심사금액	:	566,460	천원(증액)
○	절 감 액	:	6,871	천원
○	절 감 률	:	1.20	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 조정

- 무수축시멘트(초속경, 20kg) : 900천원/ton→850천원/ton 등 2개 품목조정

- 콘크리트 설치 : 품셈(공통) 6-1-2 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 공사기간 변경(연장) 사항은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의 결과 : 이견 없음