문서번호	토목부-20667
결재일자	2012.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
협 조
	설비부장
	터널건설과장
	교량건설과장
	도시고속도로과장
	치수시설과장

빗물펌프장 신․증설공사 추진계획

2012. 11.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	성동,서초,관악,중랑, 노원,마포,강남,강서, 동대문구)	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

빗물펌프장 신·증설공사 추진계획

□ 사업 개요

○ 발주대상 : 빗물펌프장 신·증설 13개소(신설 5개소, 증설 8개소)

○ 공사기간 : 2012.12. ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 119,672백만원(‘12년 예산 : 10,850백만원)

□ 추진현황

○ '12. 9. 24 : 빗물펌프장 신·증설공사 사업 시행 의뢰(하천관리과)

○ '12.11. 06 : 과별 업무분장 시행

□ 사업시행 방안

< 공  사 >

○ 인근 지역 통합발주

- 업무의 효율성을 고려, 도급하한제 범위내에서 인근지역(자치구별) 통합발주 시행

※ 도급하한제 적용대상 : 200억 미만공사(국토해양부 고시제2012-536호)

- 발주대상 : 총8건(통합5, 단독3)

□통합 : 방화+염창2, 중동+합정, 면목4+공릉, 신이문+용두, 송정+사근

□단독 : 용허리, 신림2, 잠원2

○ 실적 제한입찰방식으로 발주

- 수해방지 사업임을 감안, 펌프장 시공경험이 있는 업체로 실적제한

- 제한입찰 범위

제한의 종류	제 한 요 건	비 고
실적제한	◦ 추정가격 30억 원 이상 종합공사	◦해당 계약목적물의 1배 이내 (50억 미만 공사 0.7배 이내)

※ 잠원2는 계약심의위원회 심의결과에 따라 실적 제한

※ 통합발주대상의 경우 2개의 실적 중 작은 것으로 제한

(예 : A펌프장 700톤/분, B펌프장 500톤/분 → 실적제한 : 500톤/분)

○ 기계․설비분야 분리발주

- 그동안 토목공사에 포함하여 시행해오던 기계․설비분야를 하자구분이 용이한 범위내에서 분리 발주 시행

※ 근거 :「기계․설비분야 분리발주 추진계획(본부장 방침, 2012. 2.6)」

○ 주계약자 공동도급제 적용

- 적용대상 : 추정가격이 2억원이상 100억원미만 종합공사로서 발주청이 필요하다고 판단되는 공사(단, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물 등은 제외)

- 공동수급체 구성

․3개 이내로 구성하되 필요시 5개이내

․입찰공고 시 구성원별 공종내역을 구분하여 명시

○ 기타 사항

- 계약방법 : 자체 발주

추정가격 50억이상 300억 미만의 적격심사 대상사업으로 자체발주

- 계약방법 : 장기계속계약

< 감  리 >

○ 공사관리방식(하천관리과 방침)

- 100억원 이상 : 책임감리 시행(2013년도 발주) → 2건

- 100억원 미만 : 시설관리공단 감독업무 위탁 → 6건

○ 시설관리공단 공사관리대상을 책임감리(또는 시공감리)로 전환하는 것을 검토

- 빗물펌프장 공사는 수리․수문, 토목 및 건축구조, 토질 및 기초 등

복합공종으로 구성되어 있어 전문가의 검토가 필요

- 기한내 완료하여야하는 수방시설에 대한 공사관리업무를 각 분야의 전문기술자를 보유한 감리용역회사에서 수행하고, 공사완료 후 운영과정에서 발생될 수 있는 문제점을 사전 제거

- 하천관리과와 협의하여 총사업비 범위내에서 인근 지역을 묶어 통합감리로 시행 추진

※ 시설관리공단 감독업무 위탁 시 문제점

○ 비상주 공사관리로 품질 및 안전관리 미흡 소지

○ 펌프 등 분야별 전문인력 미확보로 기술적인 사항 검토 곤란

○ 전담직원 미 배치로 실정보고 및 민원 등 신속조치 지연 우려

□ 향후 계획

○ 2012. 11. : 계약심사 및 공사발주

○ 2012. 12. : 공사계약

○ 2014.  6. : 공사완료

첨부 : 2012 발주대상 1부. 끝.