도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제10차)

◉ 한강대교 보수(도장) 공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사구간 단면도는 보도 및 측구 등을 포함하여 제시하고, 교량 외 차로  점용구간도 제시요망

- 교통량 등 분석을 위한 자료가 2018년 서울시 조사자료로서 6개월이 초과 되었는 바 현황조사 및 분석결과 보완 필요

- 차로축소 시 하위차로에서 차로변경이 발생하도록 재검토하고 차로변경을  위한 노면마킹 설치 필요

- 교차로구간 및 공사구간 시점부 차로운영계획을 교차되는 도로구간을     포함하여 명확히 제시

- 공사1구간 양녕로측 점용구간 시점부 차로운영계획 재검토 (직진차로는 직진차로 측으로만 차로가 축소되도록)

- 자문의견에 대한 내용보완 후 확인절차 필요

- 2차로 통제시 분석은 주간첨두, 야간첨두로 구분하여 분석하였는데, 공사중 통제는 심야시간대로 계획하였는 바 주간시간대에는 차로점용 또는 상부 도장 공사가 이루어지는지 여부 확인 필요

- 야간 공사임을 감안하여 공사장 시점부는 로봇통제수 배치

- 시점부 완충구간은 충분한 길이를 확보하되 전방주시 태만 운전자의 사고방지를 위해 PE드럼 등 충분한 충격흡수시설 설치 검토

- 공사 1,3,6,8구간 교통처리계획도상 교통안내표지판(차로축소) 내용이 공사 점용구간과 상이하므로 확인하여 수정 요망(중앙, 가로변 점용 구분)

- 한강대교 “백년다리 조성공사”와 구간과 기간이 겹침(백년다리 조성 공사 내용을 검토하여 점용(공사) 구간의 중복으로 인한 문제 발생치 않도록 사전 협의 및 조치 필요