건설공사 안전관리계획에 추가하여야 하는 지반침하 관련 사항

□ 관련 근거

ㅇ 안전관리계획의 수립기준(건설기술진흥법 시행규칙 별표7)

1. 안전관리계획

라. 공사장 주변 안전관리대책

공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항

□ 지반침하 관련 추가사항

ㅇ 공사장 주변 안전관리대책에 지반침하 방지대책을 포함하여 작성

지하수위 및 지중매설물 현황을 파악하고, 다짐계획 등에 대하여 아래 사항을 포함하여 공사장 주변 지반침하 방지대책을 구체적으로 작성

(1) 지하수위 변동 및 흐름에 대한 안전대책

(가) 현장의 지반요건을 고려한 흙막이 벽 공법 또는 차수 공법 선정

(나) 지하수위 계측 및 관리 계획 수립

(다) 지형적 특성을 고려한 지하수의 흐름을 예상하여 지반에 대한 대책 수립

(라) 인접 공사현장 및 구조물의 영향을 고려하여 지하수위 변동 및 흐름에 대한  대책 수립

(2) 지중매설관의 유출수에 대한 안전대책

(가) 지하매설관 현황 파악

- 지하매설관에 대한 매설물의 종류, 제원(종류, 규격, 재질, 연장, 매설깊이 등)을  구체적으로  파악하여 작성

(나) 지하매설관 이설 및 인접 굴착 공사계획 수립

(다) 지하매설관 및 지반 침하를 고려한 중차량 통행계획 수립

(3) 다짐계획(재료 선정, 다짐층 두께, 상대밀도 등)을 구체적으로 수립

(4) 기타 지반침하를 방지하기 위한 안전관리계획 등