㈜ 대 한 콘 설 탄 트

우03027 서울시 종로구 필운대로9 / 전화 02)397-2397 / 전송02)397-2397 / 담당:주은재

문서번호 :	대한(상하수도) 제2019-139호
시행일자 :	2019. 10. 07.
수 신 :	서울특별시 상수도사업본부장
참 조 :	시설안전부장

선결			지시
접수	일자 시간		결 재 ․ 공 람
	번호
처리과
담당자

제    목 : 건설사업관리용역 기간 연장 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부와 계약 체결하여 과업수행 중인『국사봉 및 사당배수지 건설사업관리용역』과 관련하여, 본 공사의 공사 기간 연장으로 인해 건설사업관리용역 또한 건설기술진흥법 제39조 2항에 근거하여 연장됨이 마땅하므로 아래와 같이 연장 신청하오니 승인하여주시기 바랍니다.

- 아    래 -

사 업 명	국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합건설사업 관리용역
용역기간	구 분	당 초	변 경	비 고
	전 체	‘16.12.05~‘19.10.09	‘16.12.05~‘19.10.30	21일 연장
	4 차	‘19.01.01~‘19.10.09	‘19.01.01~‘19.10.30	21일 연장
계약금액	전 체	1,308,125,000원	1,308,125,000원	총 부기금액
	4 차	411,368,000원	411,368,000원

붙임 : 합의서 1부

주식회사 대한콘설탄트 대표이사