2015년 기능보강사업 낙찰차액 사용 검토 (관악구-성민)

관악구 성민종합사회복지관 외부창문 교체공사 낙찰차액을 사용하여 외부주차장 펜스교체공사 추가요청한 건에 대해 검토하고 그 결과를 보고함

□ 낙찰차액 사용요청

○ 요청사항

- 사 업 명 : 외부주차장 펜스교체공사  * 본사업 : 외부창문 교체공사

- 내    용 : 외부창문교체공사(총사업비 73,890천원)의 낙찰차액 6,297천원을 사용하여 주차장 추락방지용 노후 펜스 교체

(단위 : 원)

외부창문 교체공사(기존사업) 집행 현황
구 분	총사업비	시 비	구 비	자부담
교부내역	73,890,000	39,900,000	26,600,000	7,390,000
사용내역	67,592,770	36,500,082	24,333,388	6,759,300
집행잔액	6,297,230	3,399,918	2,266,612	630,700

○ 요청사유

- 주차장 경계의 낭떠러지 추락 방지용 펜스가 노후되어 안전상 긴급하게 보강할 필요가 있어 집행잔액 사용 승인 요청

□ 검토결과 : “일부승인” - 서울시복지재단 및 관악구 기술단 검토 완료

○ 승인내역

(단위 : 원)

구 분	총사업비	시 비	구 비	자부담
요 청 액	6,297,230	3,399,918	2,266,612	630,700
승 인 액	6,200,000 (△97,230)	3,348,000 (△51,918)	2,232,000 (△34,612)	620,000 (△10,700)

○ 검토내용

- 당초 시설에서 폭 2미터에 높이 1.2미터인 울타리를 14경간 설치하는 것으로 총사업비 6,297천원을 신청하였으나 자치구 기술단 검토의견(펜스높이를 1.5미터로 조정하고, 지지대 보강을 추가)을 반영하여 시설로부터 재견적을 요청

- 울타리 설치 길이는 약 19미터로 12경간이 적정하므로 14경간을 12경간으로 줄이되, 기존 내역에 없는 펜스 철거 및 지지대보강 등의 내역을 추가하여 조정,  단가는 조달청나라장터에서 동종 유사 업체의 가격이하 수준으로 적정

- 이에 대한 재견적을 제출받아 해당 사업에 대해 총사업비 6,200천원으로 부분지원