2015년 기능보강사업 변경 검토 (성북구-길음)

성북구 길음종합사회복지관 재개발 사업이 확정되어 천장텍스 교체 공사가 불필요하다고 판단하여 노후 CCTV 교체 및 컴퓨터 교체 사업으로 변경 요청한 건에 대해 검토하고 그 결과를 보고함

□ 변경요청

○ 요청사항

- 기존사업 : 천장 석면텍스 철거 및 교체

- 변경사업 : 노후 CCTV 교체 / 노후 컴퓨터 교체

(단위 : 천원)

변경전					변경요청
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
계	37,678	26,375	11,303	-	계	41,392	26,375	11,303	3,714
천장석면텍스 교체 및 철거	37,678	26,375	11,303	-	노후CCTV 교체	14,362	10,053	4,309	-
					노후 컴퓨터 교체	27,030	16,322	6,994	3,714

○ 요청사유

- 길음1재정비촉진사업 ’13.11.28(사업시행인가), 관리처분인가(’15.12월  말)으로 ’16년도 하반기 복지관이 이전하게 됨에 따라 당초 사업 내용인 천장석면텍스 교체 작업이 불필요하게 되어,

- 장소 이전과 관련 없는 노후CCTV 교체(설치 후 분해하여 이전 설치 가능), 노후 컴퓨터 교체 사업으로 변경 요청

□ 검토결과 : “일부 승인” - 서울시복지재단 검토 완료

○ 변경결정내역

(단위 : 천원)

변경전					변경결정
사업내용	총사업비	시비	구비	자부담	사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
계	37,678	26,375	11,303	-	계	37,837	26,375	11,303	159
천장석면텍스 교체 및 철거	37,678	26,375	11,303	-	노후CCTV 교체 (전액지원)	14,362	10,053	4,309	-
					노후 컴퓨터 교체 (부분지원)	23,475	16,322	6,994	159

○ 노후 CCTV 교체 : 전액지원

- 현재 설치된 CCTV는 단종으로 고장 시 수리가 어려워 16대가 고장나 (최근 4년간 7회 고장발생, 957천원 수리비 지출) 에스원으로부터 무상임대하여 임시로 운영하고 있으며, 화질이 떨어져 (41만 화소) 전체적으로는 윤곽 구분은 가능하나, 자동차 번호판, 글자에 대한 구체적인 식별은 어려움

- 재개발에 따른 시설 이전 후에도 교체하는 CCTV 일체를 이전하여 활용하는 것이 가능하며, 현 상태로서는 효과적인 안전사고 예방 및 사고처리 등에 미흡하므로 교체의 필요성이 인정되어 지원

○ 노후 컴퓨터 교체 : 부분지원

- 사용 중인 컴퓨터는 2008년 기능보강사업으로 구입하였으며 사양은 CPU intel core2 듀오 2.83GHz, 2.0GB Ram으로서 원활한 교육 진행을 진행하기에 사양이 낮은 것으로 조사됨

- 장비주요단가 기준보다 높은 가격으로 신청하여 시설간 형평성 있는 지원을 위해 주요장비단가기준(본체는 1대당 1,000천원, 모니터는 295천원)으로 조정