문서번호	도시철도토목부-433
결재일자	2019.1.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
협 조
	주무관

「하남선 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1공구) 」

계약금액 및 용역기간 조정 검토

2019. 01.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1공구)』

계약금액 및 용역기간 조정 검토

하남선(5호선 연장) 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1공구) 시행 중 궤도공사 계약금액 변경에 따라 건설사업관리용역 계약금액 및 기간을 조정하고자 검토 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 동기공2019-135호(2019.01.09) 건설사업관리용역 변경계획 검토보고

❍ 도시철도토목부-14422호(2018.12.13.) 건설사업관리기술자 투입

계획 조정 검토요청

Ⅱ		용역개요

❍ 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업

관리용역(1공구)

❍ 계 약 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소외 1사

❍ 용역기간 : 2017.08.23. ~ 2019.02.22.

❍ 계약금액 : 980,500,000원

Ⅲ		현 황

❍ 토목구조물 인계․인수 현황(궤도1공구 공사구간)

구 분		1-1공구	1-2공구	2공구	3공구
인 계· 인수일	시점 연결부 및 입출고선	‘19. 1월말 (시점부)	‘20. 12월말 (입출고선)	-	-
	본 선	‘18. 11. 22.	‘18. 9. 4.	‘18. 7. 3.	‘18. 7. 31.

❍ 궤도공사(1공구)는 공사기한이 ‘18.12.31일로서 토목구조물 인계․인수 지연으로 계약물량 완료를 위해 준공기한 연기가 필요하나,

❍ 공사계약 상대자가 도급비 증액 또는 ‘18.12월 현재 토목구조물 인수 구간까지 공사완료 후 준공을 요구하여,

❍ 공사계약 상대자 요구에 따라『하남선(5호선 연장) 궤도공사(1공구)』 토목구조물 미 인수 잔여물량은 궤도공사(2공구)에서 시행토록 변경하여 계약금액 조정 후 궤도공사(1공구) 준공 완료됨(감액 1,875백만원)

- 잔여물량 본선: 본선 L=717m, 입출고선 등:1,200m/ 도급비 감액: 1,879억원

Ⅳ		조치계획

❍『하남선(5호선 연장) 궤도공사(1공구)』의 계약물량 감소에 따라 건설사업관리용역 계약금액과 기간을 아래과 같이 조정하고자 하며,

❍ 궤도공사(2공구) 물량증가 및 서울교통공사 협의결과에 따라 시점부 야간공사 시행시 건설사업관리 용역의 기술자 투입 조정 및 계약금액을 추후 변경하여 궤도공사를 원활하게 추진하고자 함

○ 궤도공사(1공구) 건설사업관리용역 조정내용

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	`17. 8. 23 ~ `19. 2. 22	`17. 8. 23 ~ `19. 1. 31
계약금액	980,500,000원	949,300,000원	감31,200,000

Ⅴ		행정사항

❍ 상기와 같이 하남선(5호선 연장) 궤도공사(1공구) 건설사업관리용역 계약금액 및 기간을 조정토록 계약상대자와 계약부서(건설총괄부)에 통보하여 계약변경 하고자 하며,

❍ 궤도공사(1공구) 건설사업관리용역 변경계약 이후 궤도공사(2공구) 건설사업관리용역의 건설사업 기술자 투입과 계약금액을 향후 조정예정 임.

붙임 : 관련문서 사본 각 1부.  끝.