서울하천네트워크

우편번호     주소지                          전화번호         팩스번호

담당자                        이메일

문서번호:서울 제19-12161호	선람					지 시
시행일자:2019.12.16
	접수	일자 시간
						결 재 ․ 공 람
		번호
수 신 서울특별시장
	처리과
	담당자
참 조 재무과장
	심사자					심사일

제 목 『하천관리 모니터링 용역』 내용변경 및 용역기간 연장의 건

1.  본인과 귀 시와 체결한 『:하천관리 모니터링 용역』계약과 관련하여 용역 내용변경 및 용역기간 연장(4개월)에 따른 합의각서 및 용역수행공정표를 제출합니다.

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	87,115,000원		설계내역 조정
계약기간	2019.05.23 ~ 2019.12.20	2019.05.23. ~ 2020.04.20	4개월 연장
과업내용 (변경사항 중심)	설문 및 생태지도 작성	ㆍ1월~4월 생태조사 추가 ㆍ시민참여 모니터링 조사 틀 마련 및 시범운영 ※ 기타 중복내용 항목 조정	내용조정

붙임  1. 합의각서

2. 예정공정표           끝.

서울하천네트워크 대표 김진홍 (인)

『 청렴도 1위, 그 깨끗함을 지켜가겠습니다!!』

합  의  각  서

1. 계   약   명 : 하천관리 모니터링 용역

2. 계  약  업  체 : 서울하천네트워크

3. 계  약  금  액 : 금87,115,000원(금팔천칠백일십일만오천원정)

◦ 선급금액 : 일금 사천삼백오십오만칠천오백원정(￦43,557,500) (VAT포함)

◦ 잔    금 : 일금 사천삼백오십오만칠천오백원정(￦43,557,500) (VAT포함)

4. 계  약  일  자 : 2019. 5. 23.

5. 변  경  사  항 : 용역내용 변경 및 용역기간 연장(4개월)

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	87,115,000원		설계내역 조정
계약기간	2019.05.23 ~ 2019.12.20	2019.05.23. ~ 2020.04.20	4개월 연장
과업내용 (변경사항 중심)	설문 및 생태지도 작성	ㆍ1월~4월 생태조사 추가 ㆍ시민참여 모니터링 조사 틀 마련 및 시범운영 ※ 기타 중복내용 항목 조정	내용조정

본 계약에 대해서 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 준공할 것을 확약합니다.

현 장 감 독 공 무 원 경 유
소 속
직 급
성 명	□

2019. 12. 16.

주  소 : 서울시 동작구 흑석로84 209동 302호

상  호 : 서울하천네트워크

대표자 :  김 진 홍         □

서울특별시(분임)재무관 귀하

용역수행 공정표(기정)

용역명:하천관리 모니터링

착수일:2019년 5월 23일

준공일자: 2019년 12월 20일

과업기간 : 계약일 ~ 2019년 12월 20일
추진 일정 과업 공정	2019.5.23.~2019.12.20
	5	6	7	8	9	10	11	12
● 생태환경 문헌 및 실태조사 (5월 및 홍수기 전후)
● 하천별 관리전략 보완방안 마련
하천별 동식물 생태현황 보완
생태환경 관리전략 방안 마련
● 생태보존을 위한 사업방안 제시
생태환경적 측면의 보완을 위한 사업화 방안
4개 하천의 구역별 연도별 사업화 방안
각 하천별 동식물 생태지도 작성 및 시민 배포
● 하천 생태환경 유지관리를 위한 네트워크 구축, 운영
4개 하천의 동식물 서식현황 파악 모니터링
생태변화 추이 모니터링
동식물의 서식지, 이동 패턴, 이동경로 파악
생태환경 유지관리를 위한 거버넌스 모델 제시

용역수행 공정표(변경)

1. 용역명:하천관리 모니터링

2. 착수일:2019년 5월 23일

3. 준공일자: 2020년 4월 20일

4. 변경사유: 조류 및 양서류 모니터링 조사기간(‘20.1월~4월)포함을 위한 기간 연장 및 내용 일부 변경

과업기간 : 계약일 ~ 2020년 4월20일
추진 일정 과업 공정	2019.05.23.~2020.04.20
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
● 생태환경 모니터링 문헌 및 실태조사 (5월 및 홍수기 전후)
4개 하천의 동식물 서식현황 파악 모니터링
4개 하천 모니터링 결과 분석
● 하천별 관리전략 보완방안 마련
하천기본계획에서 동식물 생태현황 조사 및 보완
하천별 생태환경 관리전략 방안 마련
● 생태보존을 위한 사업방안 제시
생태환경적 측면의 보완을 위한 사업화 방안
4개 하천의 연도별 사업화 방안
● 하천 생태환경 유지관리를 위한 네트워크 구축, 운영 방안 마련
생태환경 유지관리 시민 네트워크 구축
생태환경 유지관리 시민 네트워크 운영 방안 마련