증산교 성능개선공사

설 계 내 역 서

2018.  7

Ⅰ. 공 사 설 명 서

목 적

본 과업은 서울시 중차량 통행노선상 시설물로 선정된 증산교에 대한 성능개선(DB18→DB24) 실시설계를 통하여 중차량 통행 시 시설물의 안전성 확보 및 원활한 물류 이동 경로를 확보하는데 그 목적이 있음

2. 공사위치

○ 시 점 : 서울특별시 서대문구 북가좌동

○ 종 점 : 서울특별시 은평구 증산동

3. 공사개요

○ 연장 및 폭원 : L = 60m (4@15m), B = 35m (왕복6차선)

○ 구 조 형 식 : RC슬래브교

교량명	위치	폭	연장	구조형식	설계하중	노선명
증산교	서대문구 북가좌동~은평구 증산동	35(왕복6차선)	60(4@15)	RC슬래브	DB-24	수색로

○ 세 부 공 종

(1) 단면 복구공

⦁ 단면복구 벽체, T=30mm           : 104.250 [eqn: m ^{2}]

⦁ 단면복구 천정, T=30mm           : 1686.000 [eqn: m ^{2}]

⦁ 철근노출 단면복구 벽체, T=50mm  : 0.750 [eqn: m ^{2}]

⦁ 철근노출 단면복구 천정, T=50mm  : 480.000 [eqn: m ^{2}]

⦁ 콘크리트 열화단면제거 (벽체)      : 3.165 [eqn: m ^{3}]

⦁ 콘크리트 열화단면제거 (천정)      : 74.580 [eqn: m ^{3}]

⦁ 강관비계 설치                     : 237.230 [eqn: m ^{2}]

⦁ 교각 방진망 설치                  : 526.570 [eqn: m ^{2}]

⦁ 폐기물 적재(상차)                 : 77.750 [eqn: m ^{3}]

(2) 기둥 보강공

⦁ 기둥보강                          : 144.000 [eqn: m ^{2}]

⦁ 터파기 및 되메우기                : 624.456 [eqn: m ^{3}]

⦁ Con’c 깨기                       : 86.272 [eqn: m ^{3}]

⦁ Con’c 타설                       : 86.272 [eqn: m ^{3}]

⦁ 폐기물 적재(상차)                 : 86.272 [eqn: m ^{3}]

⦁ 터파기 및 되메우기                : 48.300 [eqn: m ^{3}]

(3) 부대공

⦁ 컨테이너형 가설사무소 (6mx3m)          : 1 동

⦁ 컨테이너형 가설창고   (6mx3m)          : 1 동

4. 설계 적용 기준

(1) 환        율 : 2018년 1월 2일 매매기준율 (1,071원 적용)

(2) 자 재  시 세 : 2018년 1월호 조달청 가격정보 및 2018년 1월호 물가지에 의해 산정

(3) 노임 및 품셈 : 2018년 상반기

(4) 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈 등에 의하여 산출하고 이에 준할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출하고 그 결과를 발주청장에게 보고하여야 한다.

5. 공사기간

본 공사는 약 5개월(154일)간으로 하고 다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하고 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 보상협의 지연으로 공사연장이 불가피할 때

2) 공사기간중 연평균 강우일보다 많은 강우로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었을 때

3) 천재지변으로 인하여 작업이 불가피할 때

4) 발주청의 지시에 따라 작업을 중단하였을 때

5) 기타 민원제기, 설계변경 등으로 공사지연등의 불가피한 상황이 발생되었을 때

6. 설계 변경 조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경 할 수 있다.

1) 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

2) 시공결과 구조물 및 토공의 추정 암반선이 변경될 경우 실제에 맞추어 변경

3) 골재원 및 토취장, 사토장 등의 위치 또는 운반거리가 변경될 경우

4) 유용토 운반거리 등 각종 운반거리가 변경될 경우

5) 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

6) 시험비는 공사기간 및 물량에 따라 변경

7) 확인 측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

8) 발주청의 방침 변경 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

9) 도로대장 작성, 시공상세도면 작성(SHOP DRAWING), 시공측량, 추가토질조사 비용 등

P.S 단가는 실제에 맞추어 변경

10) 발주설계 도서는 추정된 내용이 명기되어 있으므로 실제로 보링을 실시하여

현지여건이 변경되었을 때 공사비에 반영

11) 도로부대시설(시선유도표지, 교통표지, 도로표지등)에 관한 규정 및 기준이 변경되었을 경우 변경

12) 기타 현장의 여건변동에 따라 계약 내용이 변경 시

13) 강판과 철근의 할증은 발주청장의 승인된 재단도의 결과에 따라 정산

14) 공사중 주요 공법(교량형식, 교차로의 구조, 비탈면보호공법 등) 변경시는 반드시 발주청의 설계자문 시행

∐. 예 정 공 정 표

증산교 보수공사 예정공정표
공종	세부공종	착공일로부터
			10		20		30		40		50		60		70		80		90		100		110		120		130		140			150			160
1.준비공	1.1 공사준비
		10일
2.단면 복구공	2.1 비계설치
				15일
				비계설치																			해체(5일)
	2.2 단면복구(벽체), 30mm
					열화면 제거(5일)					모르터 충진(5일)						마감(5일)
	2.3 단면복구(천정), 30mm
							20일						20일									10일
							열화면 제거						모르터 충진									마감
	2.4 철근노출 단면복 구(천정), 50mm
									30일							30일								10일
										열화면 제거						모르터 충진								마감
3.교각 보강공	3.1 물막이, 터파기
																								P1:4일/P2:4일/P3:4일
	3.2 표면처리
																								P1:4일/P2:4일/P3:4일
	3.3 섬유시트 보강
																										P1:4일/P2:4일/P3:4일
	3.4 마감코팅
																										P1:1일/P2:1일/P3:1일
	3.5 물막이 제거 및 되메우기
																														3일
5.뒷정리
																															10일
																														총 소요일수 : 154일

12일

12일

12일