양식	공사추진계획서

사업명 : 서울교 보수공사

□ 사업목적

○  본 공사는  서울교에 대한 정밀점검 용역결과 시설물 손상에 대한 보수공사를 적기 시행하여 안전성 및 내구성 향상으로 시민들의 안전한 통행을 확보하기 위함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 여의도동19 ~ 영등포동

○ 개    요

- 서울교 보수공사 : 교면방수 및 포장 18.96@, 중분대보수 118m

- 서울교 이상거동 보강공사 : 실시설계 1식, 이상거동 보강 1식

○ 사업기간 : 2020.4.29 ~ 12.30.

○ 총사업비 : 1,620,000천원

- 서울교 보수공사 : 600백만원(도급 540, 관급 40, 이전 20)

- 이상거동 보강 : 1,020백만원(실시설계 50, 보강공사 970)

○ 공 정 률 : 45 %

□ 추진현황

○ ‘20. 03. 13 : 재난관리기금 예산 재배정(안전총괄과-4158호)

○ ‘20. 04. 01 : 서울교 이상거동 보강공사 실시설계 용역계약

○ ‘20. 04. 26 : 서울교 보수공사 계약

○ ‘20. 06. 08 : 서울교 이상거동 보강공사 실시설계 용역준공

○ ‘20. 06. 08 : 용역 준공금 신청(40,829천원)

○ ‘20. 09. 02 : 서울교 이상거동 선금 지급(132,000천원)

○ ‘20. 09. 22~23 : 서울교 보수공사 보행도로 아스콘포장 완료

○ ‘20. 09. 29 : 서울교 보수 - 아스콘검수비 신청(35,673천원)

○ ‘20. 10. 08 : 서울교 보수 9월 노무비 지급(3,696천원)

○ ‘20. 10. 08 : 서울교 이상거동 보강 9월 노무비(20,130천원)

※ 공사와 관련된 추진현황을 일자별로 순서대로 정리
(추진현황 맨 아래에 기금배정 요청시의 공정을 기입)