ooo 도시재생활성화사업

1		사업개요

(단위 : 백만원)
유형	중심시가지형								담당부서			도시재생실 재생정책과 재생전략팀
사업 현황	위치		00구 00동 00번지 일원						면적			150,000㎡
	사업기간		'20.1 ~ '23.12 (4년)						계획수립용역			00엔지니어링(00백만원)
	사업단계		활성화계획 수립 중, 마중물사업 추진 중 등						현장센터			개소일		'00.00.00		센터장 총괄코디	000 (현소속 또는 직전경력)
주요추진현황	ㅇ ‘15.12.10 : 도시재생활성화지역 지정 ㅇ ‘16.06.02 : 도시재생지원센터 개소 ㅇ ‘17.12.28 : 도시재생활성화계획 수립 고시 ㅇ ‘18.12.14 : 도시재생활성화계획 변경 시의회									ㅇ ‘19.06.27 : 서울시도시재생전략계획 변경 공고 ㅇ ‘19.08.29 : 도시재생활성화계획 변경 행정협의 ㅇ ‘19.09.19 : 도시재생위원회 심의(수정가결) ㅇ ‘19.11.07 : 도시재생활성화계획 변경 수립 고시
예산 집행	총사업비				마중물사업비			'19년까지 집행액		'20년 예산현황
										전년이월(A)			금년예산(B)			예산현액(A+B)		집행액
	000억원 (마중물 000, 부처연계 000, 지자체사업 000, 민간투자 000, 공기업투자 000)				계		20,000	15,000		3,000			5,000			8,000		5,000
					국비		10,000	7,500		2,000			2,000			4,000		2,000
					시비·구비		10,000	7,500		1,000			3,000			4,000		3,000
주요준공시설 (HW)	연번 (활성화계획상)	시설명				규모			개소일		운영형태				주용도
	□-4	예시)00앵커시설				지하0층/지상0층, 연면적 00㎡			'19.8.18		000 민간위탁				1층:주민공동이용시설, 2층:현장지원센터, 3층:마을카페
	□-5	예시)00돌봄센터				지하0층/지상0층, 연면적 00㎡			'19.3.21		행정(구)직영 등				1층:아이돌봄시설, 2층:주민운동시설, 3층:공방
주민협의체 운영현황				ㅇ 총 00개 분과 운영, 000명 참여 ㅇ 각 주민협의체별 운영위원회(월0회), 분과위원회(월0회), 총회(연0회) 운영

2		월간 추진사항

※ 활성화계획이 수립된 사업은 마중물사업별로 추진 현황 작성(부처연계, 기금, 민간투자사업 등은 중요사업만 작성)

※ 준공된 사업은 ‘사업개요 주요준공시설(HW)’에 작성하고 삭제

※ 작성예시(서울역일대 도시재생사업)

세부사업명	6~7월(실적)	8~9월(예정)
마중물 사업
□ 거버넌스 구축
□ -1 도시재생거점시설 민간위탁	• ‘20.2분기 민간위탁금 74백만원 교부(4.9)	• ‘20.3분기 민간위탁금 74백만원 교부
□ -2 서울역일대 문화예술프로그램운영용역 추진	• 입찰공고(5.15~5.26), 제안서 평가위원 모집(5.15~5.25)	• 제안서 평가위원회 개최 및 우선 협상대상자 선정(5.29)
□ -3 서울역 일대 도시재생지원 센터 운영 용역 추진	• 제안서 평가위원회 개최(4.8), 계약의뢰(4.29)	• 계약 및 용역시행(5월)
□ -4 주민공동체 형성사업(공모)	• 보조금심의위원회(4.9), 선정결과 공고(4.14.) • 협약체결(5.8.), 선정단체 기본교육(5.13.)	• 사업 추진상황 모니터링
□ -5 지역제조산업 팝업 스토어 운영	• 코로나19 관련 상반기 미운영	• 하반기 운영계획수립
□ 도시재생 거점시설 조성
□-1 청파언덕집	• 민간위탁(‘19.10.1~)	• 민간위탁(‘19.10.1~)
□-2 은행나무집	• 민간위탁(‘19.10.1~)	• 민간위탁(‘19.10.1~)
□-3 빌라집	• 설계변경 완료 및 공사 시행	• 공사 및 완료(6월 말)
□-4 창고	• 민간위탁(‘19.10.1~)	• 민간위탁(‘19.10.1~)
□-5 계단집	• 민간위탁(‘19.10.1~)	• 민간위탁(‘19.10.1~)
□-6 근대가옥	• 민간위탁(‘19.10.1~)	• 민간위탁(‘19.10.1~)
□-7 검벽돌집	• 민간위탁(‘19.10.1~)	• 민간위탁(‘19.10.1~)
□-8 애니통	• 기본 및 실시설계완료에 따른 계약심의 • 기존건물 철거(석면 제거)	• 매장문화재 발굴 조사(2단계) • 공사발주
□ 보행환경개선사업
□-1 서울로2단계 연결길 조성사업	• 시범사업5개소 기본 및 실시설계 추진 • 각 길별 전담 공공조경가 위촉(5.7) • 신규사업 11개소 대상지 선정 및 사업추진 방향 및 내용 구체화 워크숍 개최(2회) • 통합브랜드 및 사이니즈 기획·제작설치 용역 발주	• 시범사업4개소 기본 및 실시설계 완료 • 시범사업4개소 공사 발주 • 통합브랜드 및 사이니즈 시범사업4개소 공사 발주
□-2 서울로∼구서울역사 옥상 연결 및 폐쇄램프 활용	• 기본 및 실시설계완료(4월) • 도시계획시설 변경 결정 고시(4.2) • 민간 공공기여 활용 방안 추진 방침 및 업무협약체결(4.2) • 사업시행자 지정 및 실시계획인가 고시(5.7) • 연계사업 협력강화 TF회의(5.7) • 연결통로 등 설계 보완 실무회의(5.11) • 연겨통로 등 설계 디자인 자문(5.21)	• 공사착수(6월) • 도시계획시설 변경 결정 고시(4.2) • 실시계획인가 고시(4.22) • 공사발주 및 착공(5월)
□ 생활환경개선사업
□-1 중림동 우리동네 가꾸기 시범사업	• 민원불편 해소를 위한 현장검토회의(3회)	• 공사
□-2 회현동 우리동네 가구기시범사업	• 공사착공	• 공사
□-3 명동, 필동 우리동네 가꾸기 사업	• 명동: 공사착공 • 필동: 공사착공	• 명동: 공사 • 필동: 공사
□ 특화공간조성사업
□-1 손기정 기념 프로젝트	• 도서관 조성 : 공사완료(3월) • 체육센터 신축 : 공사완료(4월)	• 공원 리뉴얼 : 공사완료(6월) • 전시 리뉴얼 : 공사완료(7월)
연계 사업
① 청파공원조성사업	• 지구단위계획 일괄 재정비 관련 의견제시 (공공재생과→도시관리과) (공원, 주차장 중복결정)	• 지구단위계획 변경 추진 (공원, 주차장 중복결정)

※ 활성화계획이 미 수립된 사업은 활성화계획 수립, 공동체·주민협의체 운영, 현장센터구성, 기타 중요사항 등 작성

	6~7월(실적)	8~9월(예정)
활성화계획 수립용역	• 6.27 : 용역 계약 - 세부내용 • 7.27 : 착수보고회 - 세부내용	• 8월 : 기초조사 및 지역자산조사 - 세부내용 • 9월 : 주민의견 조사, 주민간담회 - 세부내용
공동체 활성화 지원용역 주민협의체 구성·운영	• 6.15 : 용역 계약 • 7.22 : 착수보고회	• 8.15 : 도시재생대학 개강 • 7.22 : 주민협의체 분과 구성
현장센터 구성·운영	• 6.25 : 센터 설치, 운영계획 수립 • 7.21 : 센터 공간 조성	• 8.15 : 센터운영 개시 • 9.2 : 개소식
기타(회의, 자문 등)	• 7.23 : 총괄MP 및 전문가자문회의	• 8.15 : 사업관련 실무회의