점검분야	전자분야		점검일	2014.11.25(화)~11.28(금)
점 검 자	발주처	서울시도시기반시설본부 주무관 장병선 외 1명
	감리사	대흥ENG 이사 김영식 외 1명
	시공사	현대엘리베이터 직장 윤진수
	운영사	서울메트로 차장 박찬숙 외 4명
점검내용	- 9호선 2단계 구간 29주차 시운전 계획(PSD 연동시험) · 선로측 PSD 시공상태 · PSD, 차량 연동시험

공종별시험(승강장안전문) 합동점검 결과

점검결과
선로측 PSD 시공상태	□ 926역사 ○ 상선 - 1-1 : 연단 끝 로라멘트 없음, 하부 알루미늄 가이드 없음 - 4-3, 4-4, 5-2 : 비상문 상부 케이블 노출 - 7-2 : 밀리언 고무 패킹 탈락, 비상도어 하부 마감 떨어짐 ○ 하선 - 3-4 : 선로측 천정 물 떨어짐 □ 927역사 ○ 상선 - 4-4, 6-1, 8-4 : 몰탈 미충전 ○ 하선 - 1-1 : 연단부 하단 미장 및 하부 가이드 휘어짐 - 3-1, 4-1 : 로라멘트 부착 미비 - 4-4 : 연단 측면 볼트 컷팅 필요 - 5-3, 7-3 : 밀리언 하부 로라멘터 부착 미비 - 8-2, 8-4 : 가동문 하부 몰탈 떨어짐 □ 928역사 ○ 상선 - 2-1 : 로라멘트 부착 미비 - 3-1 : 수직 빔 하부 고무 떨어짐 ○ 하선 - 5-3 : 수직 빔 하부 고무 떨어짐 - 5-4, 7-1 : 장애물검지센서 볼트 미체결 □ 929역사 ○ 상선 - 1-1, 8-4 : 기구물 끝 로라멘트 없음 상부, 측면 ○ 하선 - 1-1 : 기구물 끝 로라멘트 없고 마감안됨 - 8-4 : 로라멘트 떨어짐, 기구물 끝 마감 안됨 - 4-3 : 연단측면 몰탈 튀어나옴 □ 930역사 ○ 상선 - 1-1 : 기구물 끝 가이드레일 마감판 볼트 없음, 로라멘트 떨어짐 ○ 하선 - 4-3, 5-2 : 로라멘트 떨어짐 - 8-4 : 기구물 끝 가이드레일마감판 볼트 없음, 로라멘트 떨어짐 ※ 공통사항 - 926역사~929역사 수직 빔 고무패킹 미비 및 미설치 - 926역사~930역사 장애물검지센서 구멍 고무패킹 삽입 필요
가동문 및 비상문 수동개페 시험	□ 926역사 ○ 상선 - 1-2, 2-1 : 비상문 닫힘 원활하지 않음 - 2-3 : 비상문 고리 걸리지 않음 □ 927역사 ○ 하선 - 1-2 : 우측 비상문 닫힘 원활하지 않음 - 8-4 : 우측 비상문 버튼 빠짐 □ 928역사 ○ 하선 - 3-4 : 비상문 좌측 닫힘 원활하지 않음 - 7-2 : 가동도어 수동열림 조정필요
승강장연단부↔ 차량간격 측정	□ 928역사 ○ 상선 - 1-1, 2-1 : 170mm, 3-1 : 110, 4-1 85mm ○ 하선 - 5-1 : 105mm - 4-1, 4-4, 6-4, 8-1 : 110mm - 5-4, 6-1, 8-4 : 115mm - 3-2, 3-3, 5-2 :130mm - 5-3, 7-2, 7-3 : 135mm - 4-2, 4-3, 6-3, 8-2, 8-3 : 140mm - 6-2, 8-4 : 145mm
PSD, 차량 연동시험	□ 시험항목 1. ATO 연동시험(자동모드) : 양호 2. ATO 연동시험(수동모드) : 양호 3. 개폐 시간측정 : 종합제어반 자료 확인 예정 4. 차량 인터록시험 : 양호(929역사 상선) 5. 수동 열림 개폐 시험(상선) : 시설물검증시험 기간중 시험 예정 6. 수동 열림 개폐 시험(하선) : 시설물검증시험 기간중 시험 예정 7. 수동 열림 개폐 시험(상선) : 시설물검증시험 기간중 시험 예정 8. 수동 열림 개폐 시험(하선) : 시설물검증시험 기간중 시험 예정 9. 열차 정차 위치에 따른 연동개폐 및 인터록 확인 시험 : 양호(930역사 하선 → 929역사 하선) 10. TCMS 현시시험 : 929상선, 930상선 미현시 11. 종합사령실내 PSD 정보 표출시험 : 시설물검증시험 기간중 시험 예정
타 분야 협조사항	- 926역사 하선 3-4 선로측 천정 물 떨어짐 토목마감 필요 - 928역사 승강장 연단부와 열차간 간격이 있어 연단부 건축마감 필요 - 926역사~929역사 승강장 끝 수직빔 부분 바닥 건축마감 필요 - 926역사~929역사 승강장 끝 더미부 부분 천정 건축마감 필요
향후계획	- 시설물 검증시험 · 12.8(월)~12.12(금) 전동차↔신호↔PSD 연동시험 - 현장점검 미비사항 시공사 12.7(일)까지 조치예정