과 업 지 시 서

1. 용 역 명: 2019년 성동구 상수도공사 등 건설폐기물용리용역(장기계속단가계약)

2. 용역기간: 착수일로부터 2020. 6. 30.까지 (단, 필요시 계약기간을 조정 할 수 있다.)

3. 목    적

- 성동구 관내 상수도공사 등에서 발생되는 건설폐기물을 폐기물관리법 등 관련 규정에 따라 적정 처리코자 함.

4. 용역개요

가. 위 치: 서울특별시 성동구 지역

나. 내 용: 상수도공사에서 발생되는 건설폐기물 수집, 운반 처리(발생 예상물량임)

- 건설폐기물 수집 ․ 운반: 625㎥

- 건설폐기물 중간 처리: 1,371톤

※ 위 물량은 추후 공사 시행에 따른 실제 배출량과는 상이할 수 있음.

다. 공동도급에 따른 분담이행비율은 수집․운반은 34.18%, 중간처리는 65.82%로 한다.

5. 과업지시내용

가. 본 과업은 동부수도사업소 급수운영과에서 시행하는 성동구 관내 상수도공사 등의 사업장에서 배출되는 건설폐기물 처리 용역으로서 수급자는 과업지시서와 관계법령, 규정, 지침 및 계약 문서에 따라 제반 사항을 성실하게 이행하여야 한다.

나. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 과업수행을 위한 착수계(사업수행 계획서)를 작성하여 우리사업소의 승인을 받아야 하며, 착수계(사업수행 계획서)는 아래와 같은 내용을 포함하여야 한다.

1) 과업추진방향 및 계획

2) 현장대리인(사업수행 총괄책임자) 선임계

○ 계약상대자는 용역을 총괄 관리하는 현장대리인을 선임함에 있어 자질과 업무수행능력, 경력 등을 확인 한 후 우리사업소의 사전승인을 받아 선임한다.

○ 현장대리인은 본 과업수행에 따른 지시사항의 보고, 협의 등을 대행한다.

○ 우리사업소는 현장대리인이 그 업무에 비추어 현저히 자질이 미달하거나 범죄행위 또는 중대한 과실을 범한 경우 이의 교체를 요구할 수 있고, 이러한 요구를 받은 도급자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

3) 위 공사 건 별 예정 공정에 따라 폐기물 배출물량을 감안하여 수집 운반에 필요한 운반차량의 현장별 배치 계획표(운반 차량 규격, 종류, 차량번호 명시)

다. 기록작성 보고 및 관리

1) 현장대리인은 용역을 수행하는 동안 공사현장별 폐기물 처리 현황을 매월 말일 기준하여 익월 5일 이내에 제출하여야 하고, 우리 사업소의 요구에 의해 주간보고(주간처리실적, 주간처리계획)도 하여야 한다.

2) 현장대리인은 다음 기록을 작성 날인하여 배치하고 우리사업소의 요구가 있으면 언제든지 열람할 수 있도록 하여야 한다.

○ 폐기물처리 일지.

○ 공사건별, 반출일자별, 폐기물 계근량 기록부.

○ 공사건별 폐기물 간이 인계서철.

○ 기타 현장대리인이 기록관리 하여야 하는 서류.

라. 운반차량 배치

1) 현장대리인은 우리사업소 감독공무원의 폐기물 반출지시(유선지시 또는 작업지시서)에 즉시(1일 근무시간 내)반출 조치하여 폐기물의 현장 적치에 따른 주민불편사항이 없도록 조치하여야 하며,

2) 공사건별 시공자와 협의하여 현장에서 토공사와 병행하여 직상차하는 현장의 경우 공사 현장소장과 사전 협의로 폐기물 반출 지연에 따른 공사 지연이 되지 않도록 운반차량을 현장 배치하여야 한다.

3) 야간공사 현장의 경우 야간에 현장에서 폐기물을 직접 상차하는 공사현장에는 야간에 폐기물 운반차량을 현장배치 하여야 한다.

마. 폐기물의 인수. 인계

1) 현장대리인은 폐기물관리법 시행규칙 제14조에 의한 건설폐기물 간이 인계서를 작성하여 공사현장의 폐기물 배출자와 폐기물 인수․인계를 하여야 하며, 간이인계서는 배출자와 각각 1부씩 보관하고 기성 신청 시 우리사업소에 1부를 제출하여야 한다.

2) 현장대리인은 공사건별 폐기물 간이인계서 및 계근량 확인서를 정리 및 관리하고, 우리사업소 담당공무원 및 감리원의 점검 및 지도감독을 받아야 한다.

바. 기타사항

1) 폐기물처리에 따른 기성신청은 매월 신청할 수 있으며, 용역대금은 도급자의 기성검사원 제출 시 공사건별 감독공무원의 기성검사에 의거 지급한다.

2) 공사건별 기성물량은 폐기물 계근장, 폐기물 간이 인계서 및 폐기물설계 물량을 비교 확인하여 차이 물량이 있을 경우 발주자와 계약상대자가 협의하여 재정산 후 기성 및 준공처리 한다.

3) 계약상대자는 폐기물 운반 및 처리과정에서 안전사고에 유의하여야 하며, 안전사고 발생 시는 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다.

4) 공사건별 폐기물 발생 예정물량의 80%가 반입될 때 즉시 발주자에게 통보하여야한다.

5) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[환경부예규 제552호(2015.8.10.), 행정안전부 예규 제21호(시행 2018.1.22.), 계약심사과-3716(2018.2.28.), 재무회계과-2880(2018.3.5.)]에 의거 운반거리 및 속도 증감에 따른 사항은 설계변경 시 실비 산정한다.

□운반 장소(처리장 : 30km, 경기도 남양주시 진접읍 연평리 215-1)

□ 운반 속도 및 경로(동부수도사업소→처리장)

○ 동부수도사업소→월릉교→중랑IC→동별내TG→처리장

고산자로:22.5km/h
동부수도사업소→월릉교
			북부간선:53.7km/h
			월릉교→ 중랑IC
					구리포천고속도로 : 60km/h
					중랑IC→동별내TG
							덕내로 : 35km/h
							동별내TG→처리장