설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부		요청일		2015년 1월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		글로웨이(주)
자문 안건명			교량구간 방호벽 및 LMC포장 물빼기공 변경				요청금액		감 765,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 교량구간 방호벽의 난간 및 LMC포장구간 교면 물빼기공에 대하여 설계자 검토의견과 같이 시공하지 않아도 별문제없기에 설계에 반영(삭제)코자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 교량 방호벽은 도면 및 보고서와 같이 시공(난간삭제)함이 적정하고, 교면 물빼기공은 LMC포장 (불투수층포장에 해당)은 시공하지 않아도 별문제 없으리라 판단.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: 방호벽+난간, 교면물빼기공 반영 - 변 경: 방호벽, 교면물빼기공 삭제 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 난간: 4,055m, 교면물빼기공: 3,205m - 변 경 : 난간: 삭제, 교면물빼기공: 삭제 - 증 감 : 난간: -4,055m, 교면물빼기공: -3,205m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,128,000 천원 - 변 경 : 363,000 천원 - 증 감 : 765,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 교량공 등
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 원설계자 검토의견서 1부. 3. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 4. 수량산출서 1부. 5. 관련공문 1부.					▪ 공사예정시기 - 2015. 4월 ~ 2015년 11월 ▪ 소요관급자재 - 없음.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	168,866,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	글로웨이(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의율	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎ 02-3708-8662)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ 방호벽+난간 ○ 교면물빼기공 반영		○ 방호벽(난간 삭제) ○ 교면물빼기공 삭제
공 사 비	1,128,000천원		363,000천원	감 765,000천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	적용율 82.25%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(토목부-25567 2014.12.24)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 교량 난간, 물빼기공 반영 → 교량 난간, 물빼기공 삭제
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(교량 난간 및 물빼기공 삭제) - 글로(강남) 제 2014-574호(2014.12.15)실정보고

· 교량구간 방호벽 및 LMC포장 교면물빼기공 검토보고 - 서영강남 14-407호(2014.12.22)

·  승인 이첩 - 서영강남 14-411호, 업무연락전(도시기반시설본부-14-48373(2014.12.24)관련)

· 설계변경협의율 관련 문서 - 시책사업부-13283(2009.11.18), 임광(강남) 제 2009-191호(2009.11.23)