▣ 공사중 교통처리계획(경찰청 교통안전시설 심의 내용)

※ 전 구간 야간공사시 경광등 설치(반영)

남부순환로

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 1,2번 작업구 2021.09.01.~2021.09.20	남부순환로 (탄천1교)	야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	노면도색, 차로 재구획
2	배수관로 정비공사	- 1번 작업구 2021.09.21.~2021.11.01 - 2번 작업구 2021.09.21.~2022.01.01		주간 (09:00~ 18:00)	기존 차로수 유지	-
약 123일 예정 (2021.09.01 ~ 2022.01.01)

삼전로(1)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 3번 작업구 2021.11.02.~2021.11.21	삼전로 (탄천1교 하부)	야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	교대통행 차로 재구획
2		- 3번 작업구 2021.11.02.~2021.11.21			1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	교대통행 차로 재구획
3		- 4번 작업구 2022.01.02.~2022.01.21			1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	교대통행 차로 재구획 신호현시 조정 없이 신호수 배치로 통행 유도
4		- 4번 작업구 2022.01.02.~2022.01.21			1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	교대통행 차로 재구획 신호현시 조정 없이 신호수 배치로 통행 유도
5		- 5번 작업구 2022.03.04.~2022.03.23			1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	교대통행 차로 재구획
6	배수관로 정비공사	- 3번 작업구 2021.11.22.~2022.03.03 - 4번 작업구 2022.01.22.~2022.05.01 5번 작업구 2022.03.24.~2022.05.01		주간 (09:00~ 18:00)	기존 차로수 유지	-
약 181일 예정 (2021.11.02 ~ 2022.05.01)

삼전로(2)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 6번 작업구 2022.04.04.~2024.04.23	삼전로 (삼전사거리)	야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	차로 재구획 종점부 테이퍼 축소
2		- 7번 작업구 2022.06.02.~2022.06.21			1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	노면도색, 차로 재구획 방향 노면표시 수정
3		- 7번 작업구 2022.06.02.~2022.06.21			1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	노면도색, 차로 재구획
4	배수관로 정비공사	- 6번 작업구 2022.04.24.~2022.08.01 - 7번 작업구 2022.06.22.~2022.10.01		주간 (09:00~ 익일18:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	노면도색, 차로 재구획 대향차로 활용
약 181일 예정 (2022.04.04 ~ 2022.10.01)

- 백제고분로(1)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 8번 작업구 2022.09.01.~2022.09.20	백제고분로 (삼전사거리)	야간 (22:00~ 익일06:00)	기존 차로수 유지	노면도색, 차로 재구획
2		- 8번 작업구 2022.09.01.~2022.09.20			1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	노면도색, 차로 재구획
3	배수관로 정비공사	- 7번 작업구 2022.06.22.~2022.10.01 - 8번 작업구 2022.08.22.~2022.12.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	노면도색, 차로 재구획 대향차로 활용
약 183일 예정 (2022.06.22 ~ 2022.12.01)

- 백제고분로(2)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 9번 작업구 2022.10.02.~2022.10.21	백제고분로	야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	노면도색, 차로 재구획
2	배수관로 정비공사	- 9번 작업구 2022.10.22.~2023.01.31 - 10번 작업구 2022.12.02.~2023.04.03		공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	노면도색, 차로 재구획
				점용시간 전일 (24시간)
약 184일 예정 (2022.10.02 ~ 2023.04.03)

- 백제고분로(3)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 11번 작업구 2023.02.01.~2023.02.20	백제고분로 (배명사거리)	야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (3개차로→1개차로)	노면도색, 차로 재구획
2	배수관로 정비공사	- 11번 작업구 2023.02.21.~2023.06.01 - 12번 작업구 2023.04.04.~2023.08.01		공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	노면도색, 차로 재구획
				점용시간 전일 (24시간)
약 182일 예정 (2023.02.01 ~ 2023.08.01)

- 백제고분로(4)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 13번 작업구 2023.06.02.~2023.06.21	백제고분로	야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (2개차로→1개차로)	- 교대통행 마을버스(강남15) 운행노선 추후협의 필요
2	복공판 설치공사	- 14번 작업구 2023.08.02.~2023.08.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
3	배수관로 정비공사	- 13번 작업구 2023.06.22.~2023.10.01 - 14번 작업구 2023.08.22.~2023.12.01		주간 (09:00~ 18:00)	기존 차로수 유지	- 차로 재구획
약 183일 예정 (2023.06.02 ~ 2023.12.01)

- 백제고분로(5)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	배수관로 정비공사	- 15번 작업구 2023.10.02.~2024.01.31 - 16번 작업구 2023.12.02.~2024.04.02	백제고분로 (석촌역 교차로)	공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	2개 차로 점용 (6개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 석촌역 교차로 공사중 신호운영방안 수립 유도선 변경 및 칼라 레인 설치
				점용시간 전일 (24시간)
2	복공판 설치공사	- 17번 작업구 2024.02.01.~2024.02.20		야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획

< 표 계 속 >

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
3-1	배수관로 정비공사	- 16번 작업구 2023.12.02.~2024.04.02	백제고분로 (석촌역 교차로)	공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	2개 차로 점용 (4개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 석촌역 교차로 공사중 신호운영방안 수립 유도선 변경 및 칼라 레인 설치
				점용시간 전일 (24시간)
3-2		- 17번 작업구 2024.02.21.~2024.06.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
약 244일 예정 (2023.10.02 ~ 2024.06.01)

- 백제고분로(6)

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	배수관로 정비공사	- 18번 작업구 2024.04.03.~2024.08.01	백제고분로 (방이사거리)	공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (5개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 횡단보도 재도색 횡단보도 우회안내 추가 제시
				점용시간 전일 (24시간)
2	복공판 설치공사	- 18번 작업구 2024.04.03.~2024.08.01 - 19번 작업구 2024.06.02.~2024.06.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 횡단보도 재도색
3	배수관로 정비공사	- 18번 작업구 2024.04.03.~2024.08.01 - 19번 작업구 2024.06.02.~2024.10.01		공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 횡단보도 재도색
				점용시간 전일 (24시간)
4	복공판 설치공사	- 20번 작업구 2024.08.02.~2024.08.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
5	배수관로 정비공사	- 19번 작업구 2024.06.22.~2024.10.01 - 20번 작업구 2024.08.22.~2024.12.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (5개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
약 243일 예정 (2024.04.03 ~ 2024.12.01)

위례성대로

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	배수관로 정비공사	- 21번 작업구 2024.12.02.~2025.04.03	위례성대로	공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	2개 차로 점용 (6개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 유도선 변경 및 칼라 레인 설치
				점용시간 전일 (24시간)
2	복공판 설치공사	- 21번 작업구 2024.10.02.~2024.10.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (11개차로→10개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 유도선 변경 및 칼라 레인 설치
3-1	복공판 설치공사	- 21번 작업구 2024.10.02.~2024.10.08		야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
3-2	복공판 설치공사	- 21번 작업구 2024.10.09.~2024.10.15		야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (5개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 유도선 변경 및 칼라 레인 설치
4	배수관로 정비공사	- 21번 작업구 2024.12.02.~2025.04.03 - 22번 작업구 2024.10.16.~2025.01.31		공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	2개 차로 점용 (11개차로→9개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 유도선 변경 및 칼라 레인 설치
				점용시간 전일 (24시간)
5-1	배수관로 정비공사	- 23번 작업구 2025.12.02.~2026.01.31		공사시간 주간 (09:00~ 18:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
				점용시간 전일 (24시간)
5-2	배수관로 정비공사	- 26번 작업구 2026.04.24.~2026.08.01	올림픽로	주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 올림픽회관 교차로 공사중 신호운영방안 수립
약 22개월 예정 (2024.10.02 ~ 2026.08.01)

올림픽로

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 24번 작업구 2025.02.01.~2025.02.20	올림픽로	야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
2	복공판 설치공사	- 25번 작업구 2025.04.04.~2025.04.23		야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
3	배수관로 정비공사	- 24번 작업구 2025.02.21.~2025.06.01 - 25번 작업구 2025.04.24.~2025.08.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
4	복공판 설치공사	- 26번 작업구 2024.06.02.~2024.06.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
5	복공판 설치공사	- 27번 작업구 2025.12.02.~2025.12.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	3개 차로 점용 (9개차로→6개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 횡단보도 재도색 올림픽대교남단 교차로 공사중 신호운영방안 수립
6	배수관로 정비공사	- 26번 작업구 2025.06.22.~2025.10.01 - 27번 작업구 2025.12.22.~2026.04.03		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (5개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
7	복공판 설치공사	- 28번 작업구 2025.12.02.~2025.12.21		야간 (22:00~ 익일06:00	2개 차로 점용 (8개차로→6개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 - 올림픽회관 교차로 공사중 신호운영방안 수립(공사시행전 운영관련 재협의 )
8	복공판 설치공사	- 29번 작업구 2026.02.01.~2026.02.20		야간 (22:00~ 익일06:00	2개 차로 점용 (4개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
9-1	배수관로 정비공사	- 28번 작업구 2025.12.22.~2026.04.03		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 - 올림픽회관 교차로 공사중 신호운영방안 수립(공사시행전 운영관련 재협의 )
9-2	배수관로 정비공사	- 29번 작업구 2026.02.21.~2026.06.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
10	복공판 설치공사	- 30번 작업구 2026.04.04.~2026.04.23		야간 (22:00~ 익일06:00	2개 차로 점용 (6개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획 올림픽대교남단 교차로 공사중 신호운영방안 수립
11	배수관로 정비공사	- 29번 작업구 2026.02.21.~2026.06.01 - 30번 작업구 2026.04.24.~2026.08.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (5개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
약 26개월 예정 (2024.06.02 ~ 2026.08.01)

강동대로

단계	공종	공사기간	구간	점용시간	점용 차로수 (현황→공사중 차로)	개선내용
1	복공판 설치공사	- 31번 작업구 2025.10.02.~2025.10.11	강동대로	야간 (22:00~ 익일06:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
2	복공판 설치공사	- 31번 작업구 2025.10.12.~2025.10.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (3개차로→1개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
3-1	배수관로 정비공사	- 27번 작업구 2025.12.22.~2026.04.03		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (3개차로→2개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
3-2	배수관로 정비공사	- 31번 작업구 2025.10.22.~2025.12.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (6개차로→5개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
4	복공판 설치공사	- 32번 작업구 2026.06.02.~2026.06.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	2개 차로 점용 (5개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
5	복공판 설치공사	- 32번 작업구 2026.06.02.~2026.06.21		야간 (22:00~ 익일06:00)	3개 차로 점용 (9개차로→6개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
6	복공판 설치공사	- 32번 작업구 2026.06.02.~2026.06.21		야간 (22:00~ 익일06:00	2개 차로 점용 (6개차로→4개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
7-1	배수관로 정비공사	- 30번 작업구 2026.04.24.~2026.08.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (4개차로→3개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
7-2	배수관로 정비공사	- 32번 작업구 2026.06.22.~2026.10.01		주간 (09:00~ 18:00)	1개 차로 점용 (6개차로→5개차로)	- 노면도색, 차로 재구획
약 12개월 예정 (2025.10.02 ~ 2026.10.01)