< 붙임 1 >

국고보조금 교부신청서

( 기후변화적응 및 국민실천 )

신청자	담당과	서울특별시 양천구 맑은환경과
	담당자	이상우/환경7급/02-2620-4875/ muco@yangcheon.go.kr
사 업 명		지자체 기후변화 적응 선도사업
사 업 목 적		기후변화 취약계층 및 공공건물 폭염 방지대책
사업비 (백만원)	구 분	계
	총 계	45.0
	국 비	22.5
	시(도)비
	시․군비	22.5
	민간부담
사업기간	착수예정일	2018-05-01
	완료예정일	2018-10-30
「보조금 관리에 관한 법률」제16조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 위와 같이 국고보조금의 교부를 신청합니다. 2018년 4 월 일 신청자 : 양 천 구 청 장 (직인) 환경부장관 귀하
첨부서류 : 지방비 확보 예산서 사본 1부

사 업 계 획 서

1. 사업목적 : 기후변화 취약계층 및 공공건물 폭염 방지대책

2. 사업기간 : 2018. 5. 1. ∼ 10. 30.

3. 사업위치(위치도 별첨 1) : 서울시 양천구 목동문화체육센터 외 2개소

4. 사업대상지 현황

○ 서울특별시 양천구 기후변화 적응대챆 세부시행계획(2016~2020)에 따르면 양천구의 연평균 기온(13.3℃)은 서울시 평균(13.0℃)보다 높음

○ 양천구 기후변화 적응대책 중점 추진분야는 건강분야가 우선 요구되며, 온실가스 저감정책을 시행하지 않을시 양천구의 연평균 기온은 2000년도에 비해 2040년대에는 2.1℃, 2090년대에는 5.6℃ 상승전망으로 폭염과 관련하여 많은 피해가 발생될 것으로 예측됨

5. 사업의 필요성

○ 기후변화 취약계층의 단체 생활공간(어린이집)과 다수의 주민이 이용하는 다중이용시설 공공건축물에 대한 폭염대비 집중관리 필요

○ 사업지역은 대부분 서울특별시 양천구 기후변화 적응대책 세부 시행계획(2016~2020)의 VESTAP(기후변화 취약성 평가의 동 단위 분석툴) 결과 중 폭염분야 취약성이 높은 상위군에 해당됨

6. 사업비 산출근거

(단위 : 백만원)

세부내역	금 액	산 출 내 역	국고지원비율
합 계	45.0	옥상면적×시공단가	50%
다솜 어린이집	10.0	220㎡×150,000원/3.3㎡
꿈나래 어린이집	10.0	220㎡×150,000원/3.3㎡
목동문화체육센터	25.0	550㎡×150,000원/3.3㎡

7. 사업효과

○ 기후변화 취약계층 및 공공건물 다수 이용자에 대한 폭염방지대책 사업으로 국민건강보호

○ 쿨루프 사업에 따른 실내온도 하강에 따라 하절기 냉방에너지 사용 절감

8. 사업추진 세부일정 및 사업비 집행계획

대 상	시 기	예산액(백만원)	비고
목동문화체육센터	‘18.5월~6월	25.0	7∼8월 장마시기 제외
다솜&꿈나래어린이집	‘18.9월~10월	20.0

9. 지방비 확보 내역 또는 계획

○ 예산서 사본 [별첨 2]

(별첨 1)

사 업 위 치 도

사업대상	위치	전경
목동문화체육센터 (목동중앙본로 73)
구립다솜어린이집 (목동중앙로13길 22)
구립꿈나래어린이집

(별첨 2)

예 산 서(사본)