2014년도 수도사업소 경영실적 자체 평가표

※ 평가결과 판정 : 양호, 보통, 미흡

연번	구 분 (부서별)		평 가 항 목	단 위	‘14 목표달성도			평가 결과
					목표(접수)	실적(처리)	달성율(%)
18	급수운영과	구역관리	송배수관 정비	㎞	1.5(2)	-	-	미흡
19			노후 배급수관 정비	㎞	5.8(2)	1.4	24.1	양호
20			합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	백만원	(5)	164	’13년대비 (0.75%향상)	양호
21			기존관 철거	m	4.0(2)	1.4	35	양호
22			불용관 정비	건	880(2)	450	51.1	양호
23			유수장애 상수도관 이설	건	28(1)	24	85.7	양호
24		급수공사	GIS 운영실적	계	(5)
				㎞	신설 10	2.8	28	양호
				㎞	기존 90	32	14.4	양호
				건	속성10,000건	4,028	40.3	양호
25		누수탐지	누수탐지	건	350(2)	139	39.7	양호

※ 평가단위는 과별로 적정하게 재작성해도 됨

18	송배수관정비	급수운영과 급수설비

평가개요

사업내용

- 내구연한이 경과되어 내구성이 취약한 40년 이상된 관

- ’14년 정비목표 : 1.5㎞

평가방법

평가방법 (배점:2점)	평가사업소실적률(연가실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

2013년 평가결과 : 1.9점(만점:2점)

구 분	목 표 (㎞)	실 적 (㎞)	실적률 (%)	평 점	표준화 점 수	순 위	비 고
중 부	4.13	1.88	45.52	42.89	0.86	8
서 부	5.73	4.37	76.27	71.86	1.44	5
동 부	8.03	5.46	68.00	64.07	1.28	6
북 부	3.59	3.81	106.13	100.00	2.00	1
강 서	1.26	0.65	51.59	48.61	0.97	7
남 부	2.58	2.6	100.78	94.96	1.90	3	1위와 편차 : -0.1점
강 남	3.99	3.75	93.98	88.56	1.77	4
강 동	3.79	3.88	102.37	96.46	1.93	2

※ 평가결과 : 정상 추진

추진실적(’14. 5월 현재)

추진실적 : 착공 및 발주준비 중

- 굴착공법 : 505m(시공업체 선정)

- 비굴착 갱생공법 : 1,000m

※ 본부지시에 의한 잠정 중단

문제점 및 개선방안

비굴착 갱생공법 잠정 중단(본부지시)

향후계획

굴착공법 : 9월말까지 공사완료 가능

비굴착 갱생공법 : 12월 준공

19	노후 배급수관 정비	급수운영과 급수설비

평가개요

사업내용

- 배․급수관(350㎜이하)정비 : 2,095.4㎞

- 노후된 배급수관을 정비하여 안전하고 맛있는 아리수 공급

- 고도정수처리시설이 완료된 수계(금천구)를 중심으로 배관망 정비

- 시험굴착으로 관 상태를 확인하고 설계심사를 강화하여 예산 절감

구 분	정비대상	기교체 (’84～’13)	연차별 계획			비 고
			소계	’14년	’15년 이후
연 장(㎞)	2,077.1	2,009.2	60.9	5.8	55.1	7㎞ 재개발
사업비(억원)	3,586	3,217	369	37	332

평가방법

평가방법 (배점:2점)	평가사업소실적률(연가실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

2013년 평가결과  : 2점(만점:2점)

구 분	목 표 (km)	실 적 (km)	실적률 (%)	평점	표준화 점 수	순위	비 고
중 부	6.0	6.3	105.0	100	2	1
서 부	4.7	4.4	93.6	70.8	1.41	2
동 부	4.5	5.1	113.3	100	2	1
북 부	2.5	2.3	92.0	69.6	1.39	3
강 서	3.0	3.7	123.3	100	2	1
남 부	4.0	4.8	120.0	100	2	1
강 남	2.5	2.7	108.0	100	2	1
강 동	2.8	3.7	132.1	100	2	1

※ 평가결과 : 양호

추진실적(’14. 5월 현재)

정비실적 : 1.4㎞(24.1%)

연번	사 업 명	공사개요	추진실적(m)	비 고
	계	D=150~300㎜, L=5,800m	1,400
1	시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=2,248m	-	횡단굴착 중
2	대방동 341-3~501번지외 2개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=1,088m	400
3	양평동1가 13-31~20번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜, L=1,060m	828
4	연간단가계약공사	D=100~300㎜, L=1,404m	172

문제점 및 개선방안 : 없음

향후계획 : 10월까지 정비 완료 예정

20	합리적인 공사원가 작성에 의한 예산절감	급수운영과 급수설비

평가개요

사업내용

- 공사설계서 작성 시 오류를 최소화하여 예산 낭비 사전 예방

※ 계약심사 시 감액 편차가 클수록 감점요인

평가방법

평가방법 (배점:5점)	(79+21×	평가사업소 실적률 - 최하위 사업소 실적률	)
		1위 사업소 실적률 - 최하위 사업소 실적률

배점 5점 (’13년 조정률 3.05%)

※ 본부 결과 비공개사업으로 사업소별 평가자료 없음

추진실적(’14. 5월 현재)

5월 현재 심사요청금액 : 18건 7,114백만원

- 심사금액 조정률 : 2.30%(164백만원)

구 분	계	배관정비		연간단가				기전사업	기 타
		송배수관	배관정비	급수공사	시설물	긴급누수	포장복구
건 수	18	1	3	2	2		1	9
요청금액(백만원)	7,114	325.4	1,176.5	1,455.9	1,561.6		1,585.7	1,008.9
조정금액(백만원)	6,949.8	300.3	1,136.3	1,452.7	1,518.0		1,554.4	988.1
조정률(%)	2.30	8.37	3.41	0.22	2.78		1.97	2.06

- ’13년 실적률 3.05%보다  0.75%향상됨

개선방안

- 감액요인을 줄이기 위한 설계멘토제 운영

향후계획

설계변경 시 수량산출 등을 최대한 정확하게 작성

설계내역 정밀 검토하여 심사 조정률 최소화

설계멘토링 강화

21	기존 관 철거	급수운영과 급수설비

평가개요

사업내용

노후관 교체 시 기존관은 전량 철거를 원칙

※ 지하에 매설된 여러 가지지 장물(체신,가스,전선 등)로 인해 부득이 철거하지 못하는 경우는 폐쇄 조치

- 기  간 : ’14. 1 ~ 12

평가방법

평가방법 (배점:2점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

2013년 평가결과 : 1.54점(만점:2점)

구 분	목 표(m)	실 적(m)	실적률(%)	평 점	표준화 점 수	순 위
중 부	5,554	3,610	64.9	73.7	1.47	7
서 부	3,060	2,295	75.0	85.2	1.70	2
동 부	5,115	3,529	68.9	78.2	1.56	5
북 부	2,260	1,989	88.0	100	2.00	1
강 서	3,663	2,564	69.9	79.4	1.58	4
남 부	3,910	2,659	68.0	77.2	1.54	6	1위와 편차 : -0.46점
강 남	2,665	1,999	75.0	85.2	1.70	2
강 동	3,726	2,720	73.0	82.9	1.65	3

※ 평가결과 : 미흡

- 철거대상 관로와 부설관로방향 불일치(굴착불가)로 인한 기존관 철거 불가

추진실적(’14. 5월 현재)

철거실적 : 999㎞(81.3%)

연번	사 업 명	공사개요	철거	폐쇄	비 고
	계	D=80~300㎜, L=4,396m	999	229	81.3%
1	시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=2,248m	-	-	-
2	대방동 341-3~501번지외 2개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜, L=1,088m	400		100%
3	양평동1가 13-31~20번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜, L=1,060m	599	229	72%

문제점 및 개선방안 : 없음

향후계획

급수공사에서 시행하는 노후관정비의 철거율을 높이는데 독려

22	불용관 정비	급수운영과 급수설비

평가개요

사업내용

각종 공사 시 발견되는 불용관을 분기점에서 폐쇄하여 누수발생을 사전에 예방함으로서 유수율 증대

- 기  간 : ’14.1 ~ 12

- 사업비 : 940백만원

평가방법

평가방법 (배점:2점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

2013년 평가결과 : 2점(만점:2점)

구 분	목 표 (건)	실 적 (건)	실적률(%)	평 점	표준화 점 수	순 위	비 고
중 부	1,440	1,670	115.97	100	2	1
서 부	1,900	1,998	105.15	100	2	1
동 부	750	1,270	169.33	100	2	1
북 부	580	940	162.06	100	2	1
강 서	520	705	135.57	100	2	1
남 부	1,330	2,365	177.81	100	2	1
강 남	230	611	265.65	100	2	1
강 동	750	985	131.33	100	2	1

※ 평가결과 : 양호

추진실적(’14. 5월 현재)

목표 : 880건

실적 : 450건(51.1%) - 정산추진

문제점 및 개선방안 : 없음

향후계획

각종 공사 시 발견된 불용관 즉시정비

종방향 불용관 끝까지 추적 정비

각종 장애물 등으로 즉시 정비 불가 건에 대하여 내부방침 후 장기관리

미 정비된 대형불용관(400㎜이상) 적극 발굴 정비

23	유수장애 상수도관 이설	급수운영과 급수설비

평가개요

사업내용

하수관내 유수흐름에 지장을 주는 상수도관을 정비하여 누수요인의 사전제거 및 침수피해 사전예방

- 목 표 : 28건(목표는 자치구 통보건수를 대상으로 유동적임)

- 기  간 : ’14.1 ~ 12

- 사업비 : 27백만원

평가방법

평가방법 (배점1점)	평가사업소 실적률 / 1위사업소 실적률×100×감비율

◆ 평점기준 : 정비완료 건수 20건이상, 80mm이상 10건이상 ⇒ 100%

- 정비완료된 건수별 감비율         : 19~10건 -2%, 9건~0건 -3%

- 80mm이상 정비완료 건수별 감비율 :  9~5건 -2%,   4~0건 –3%

2013년 평가결과 : 1점(만점:1점)

구 분	목표	실적	실적률 (%)	감비율	평점	표준화 점 수	순위	비 고
중부	15	20	100	0	100	1	1
서부	37	37	100	0	100	1	1
동부	7	7	100	0	100	1	1
북부	11	11	100	0	100	1	1
강서	11	15	100	0	100	1	1
남부	8	17	100	0	100	1	1
강남	-	1	100	0	100	1	1
강동	-	2	100	0	100	1	1

※ 평가결과 : 양호

추진실적(’14. 5월 현재)

- 24건 정비 완료(85.7%)

문제점 및 개선방안 : 없음

향후계획

구청 추가통보 시 신속한 현장 확인 조치

24	GIS 운영실적	급수운영과 급수공사

평가개요

사업내용

- 데이터 베이스의 신속 정확한 유지관리

․ 신규공사 자료접수 및 기존 변경 자료의 발생 즉시 신속한 편집 정리

- 측 량

․ 용역업체: 신규 단위공사 및 D=50㎜이상, L=10m이상 급수공사

․ 시공업체 : 기존배관 및 D=50㎜이하, L=10m미만 급수공사

- 시스템 활용

․ 디지털 도면으로 배관 현황을 정확하게 검색하여 사업계획 수립에 활용

평가방법

평가방법 (배점:5점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

2013년 평가결과 : 5점(만점:5점)

구 분	실적점수	평 점	평가지표가중치	표준화점수	순 위	비 고
중 부	96.05	97.79	0.05	4.89	7
서 부	97.44	99.21	0.05	4.96	3
동 부	96.00	97.74	0.05	4.89	7
북 부	96.93	98.69	0.05	4.93	4
강 서	96.63	98.38	0.05	4.92	5
남 부	98.22	100	0.05	5.00	1
강 남	96.49	98.24	0.05	4.91	6
강 동	97.82	99.59	0.05	4.98	2

추진실적

(2014. 5현재)

구 분	2014년도 목표대비 정비 실적			비 고
	계 획	실 적	진 도(%)
신설배관 입력	10km	2.8km	28
기존배관 입력	90km	132km	14.4	신규업체 4월발주 시작
속성자료 입력	10,000건	4,028	40.3

전년동기 비교 실적 : 동일 형태 실적유지(양호)

문제점 및 개선방안(세부추진사항 등) : 없 음

전망 및 향후추진 대책

실적 평가대비 상위실적 유지 전망

공사관리, 급수공사, 시설물관리, 누수복구공사 등 누락자료 체크 강화

각종 공사 준공시 자료제공 확인 철저 이행

25	누수탐지	급수운영과 누수탐지

평가개요

사업내용

- 연도별 누수탐지 실적

구 분	’09년	’10년	’11년	’12년	’13년	’14년
계획(건)	780	820	820	700	450	350
실적(건)	894	978	985	761	446	139

- ’14년 목표 : 350건

평가방법

평가방법 (배점:2점)	평가사업소 실적률(연간실적/연간목표×100) / 1위사업소 실적률×100

2013년 평가결과 : 2점(만점:2점)

구 분	목 표 (점)	실 적 (점)	실적률 (%)	평 점	표준화 점 수	순위	비 고
중 부	440	406	92.3	93.1	1.86	3
서 부	380	278	73.2	73.8	1.47	6
동 부	460	99	21.4	21.6	0.43	7
북 부	260	52	20.0	20.2	0.40	8
강 서	310	253	81.5	82.2	1.60	4
남 부	450	446	99.1	100.0	2.00	1
강 남	270	265	98.0	98.9	1.98	2
강 동	230	185	80.2	80.9	1.62	5

※ 평가결과 : 양호

추진실적(’14. 5월 현재)

목표 : 350건 상반기 목표대비 79.4% (상반기 175건/하반기 175건)

실적 : 다점형 134건(81.2%)/ 일반 음청식 5건(50%)

탐지인력 현황 (총16명)

탐지원 7명(공무직1명), 기간제근로자 8명

향후 추진방향

유수율이 저조한 중블록(소블록)부터 다점형상관식 탐지

취약지역 (단일관로,시장, 지하철역사주변, 하수박스 등 )집중탐지

공급량 변동이 많은 지역 탐지(퇴수변 정기점검)

해빙기, 갈수기, 최근 3년간 누수다발관로 등 특별 탐지

정밀탐지가 필요한 지역은 다점형상관식 탐지 병행 실시