붙임1

기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	건 축

건 명	서울시립과학관 천체관측실 구축 감리용역

요청기관명	서울특별시 서울시립과학관
제출년월일	2019년 10월 18일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 감리 용역 ○용 역 비 : 금3,700,000원 ○용역기간 : 계약일로부터 2019년 12월17일 까지 ○사업규모 : 45.61㎡ ○입찰참가자격(면허 등) : 건축사법에 의한 건축사면허를 소지하고 건축사사무소 등록을 필한 업체
자체시행 가능여부	○용역시행 목적 용역시행을 통해 효율적인 사업관리로 사업추진에 만전을 기하고 견실시공을 진행하고자 함 ○추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) -서울시립과학관 천체관측실 구축 추진계획 [전시과6054-2019.8.14.] -서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 감리용역 추진계획 [전시과7834-2019.10.18.]
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, □ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : ‘서울시립과학관 천체관측실 구축공사’는 기술심사담당관 자체 시행기준에 따라 자체감독대상이나 과학문화시설로 전설로 전문성을 요한는 공사임 허나, 부서사정상 자체감독인력 부재로 외부 감리용역을 추진 하고자 함 ※ 알림 : 주요공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체 추진
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 (투자심사결과서, 상위계획 반영내용 첨부) ○2030 서울생활권계획 협의대상 여부 ■ 대상, □ 비대상 ※ 협의대상시 관련부서 의견조회(기술심사담당관 → 전략계획과) ○용역추진경위 - ‘19.10월18일 : 감리용역 추진계획 수립

과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 천체관측실 증축 공사의 안정적인 관리를 통하여 시민들 에게 안전하고 쾌적한 관람시설 제공 ○과업의 범위 - 위 치 : 서울시립과학관 메이커스튜디오 옥상 - 시간적 범위 : 계약일로부터 2019.12.17.까지 - 내용적 범위 : 천체관측실 구축에 대한 전반적인 기술지도 수행 ○주요 과업내용 - 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부 - 품질관리, 시공관리 및 안전관리 등에 대한 지도 - 각종 시험 입회 및 준공도서 검토, 준공검토
사업추진계획 (절차)	○ 예비타당성조사,타당성조사,기본계획,기본설계,실시설계 등 년도별 추진 일정계획 - ‘19.10월16일 : 감리용역 추진계획 수립 - ‘19.10월17일 : 기술용역타당성 심사요청 - ‘19.10월19일 : 용역발주 - ‘19.10월23일~ : 감리용역시행 - ‘19.12월17일 : 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	해당없음
리스크관리심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 해당없음 ○용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 - 해당없음 ○기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 - 해당없음
사업의 예상효과	○ 서울시립과학관에 부족한 천문교육 및 관측공간 조성을 통해 시민들에게 다양한 과학문화활동 기회를 제공하여 과학관 이용 만족도 향상

※ 참고 : 기술용역 발주부서 자체시행 대상 47개 공종(행정2부시장 방침 제10058호 : ̀11.7.8)

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서 : 내부시행품의 및 투자심사 요청 서류

2. 용역 대가 산출근거 : 엑셀문서로 작성

가. 실비정액가산방식 : 공종(항목)별 등급기술자 투입인원 수 산출근거

나. 공사비요율에 의한 방식 : 개략공사비 산출근거

다. 각종 적용요율 근거

3. 기 수행(유사)용역 보고서