붙임6-1

기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 2022-2691호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	도로(교량,터널)

건 명	서울교외 8개소(교량) 정밀안전점검 및 실태조사용역

요청기관명	강서도로사업소 시설보수과
제출년월일	2022년 8월 24일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 서울교외 8개소(교량) 정밀안전점검 및 실태조사용역 ○ 용 역 비 : 301,083,860원 ○ 용역기간 : 착수일로부터 240일 ○ 사업규모 : 총 9개 시설 - 목동교, 고척교, 서울교, 광명교, 구로1교, 역곡천교, 여의하류2교, 개화램프B교, 가족길교 ○ 입찰참가자격(면허 등) : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조 규정에 의거 안전진단전문기관(교량 및 터널)으로 등록된 업체 또는 시설물유지관리업 등록 업체
자체시행 가능여부	○ 용역시행 목적 - 시설물의 안전과 기능적 결함을 사전에 점검하여 조사․측정 평가 함으로서 적절하고 신속한 조치를 취해 시설물을 안전한 상태로 유지함과 사후 유지관리에 필요한 자료를 수집하는데 있음 ○ 추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) - 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시) 및 같은법 시행령 제8조(안전점검의 실시) 의거 정밀점검 시행
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, □ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : ※ 알림 : 주요공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체 추진
	○ 투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 - 해당없음(투자심사결과서, 상위계획 반영내용 첨부) ○ 2030 서울생활권계획 협의대상 여부 □ 대상, √ 비대상 ※ 협의대상시 관련부서 의견조회(기술심사담당관 → 생활권계획추진반) ○ 용역추진경위 : 시설물의 안전점검․진단 5개년 세부계획에 의거 시특법상 정밀점검 주기 도래
과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 시설물의 물리적․기능적 결함을 사전에 발견하여 원인 등을 조사ㆍ 측정 평가하고 적절하게 신속한 조치를 취함으로서 시설물 유지 관리에 만전을 기함과 사후 유지관리상 자료를 수집하는데 있음 ○ 과업의 범위 : 도로시설물 전구간(본교 상·하부, 복개 상·하부) ○ 주요 과업내용 : 관련도서검토, 외관조사및외관망도작성, 비파괴 등 현장시험, 현장시험결과분석, 상태평가, 보수·보강 및 유지관리방안 제시

사업추진계획 (절차)	○ 2023. 3월 : 용역 발주 ○ 2023. 4월 ~ 11월 : 과업수행 ○ 2023. 11월 : 용역 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 용 역 명 - 2019년 정밀점검용역(시설물별) - 2021년 정밀점검용역(시설물별) ○ 발주기관 : 서울특별시 강서도로사업소 ○ 유사용역 자료활용 계획 - 기 시행한 정밀점검 결과와 금번 용역결과 비교분석하여 교량 상태 변화상황을 파악하고 향후 점검․진단 및 유지 관리 기본자료로 연계
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 : 없음 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 : 재하시험으로 교통통제에 따른 우회로 홍보계획 수립 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 : 없음 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 용역비 증가시 낙찰차액사용 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 없음
사업의 예상효과	○ 시설물의 안전과 기능적 결함을 사전에 점검하여 조사․측정 평 가함으로서 적절하고 신속한 조치를 취해 시설물을 안전한 상 태로 유지함과 사후 유지관리에 필요한 자료를 제공함 ○ 안전진단 전문기관에 의한 철저한 점검용역으로 시설물유 지관리 강화 ○ 시설물의 공용수명 연장 및 안전확보로 시민불편 해소

기 시행(유사) 용역 현황

□ 정밀점검, 정밀안전진단 현황

연번	시설물명	시설물 구 분	준공년도	용역 시행현황			평가등급
				용역 종류	시행기간	용역비 (백만원)
1	서울교	2종	2004	정밀점검	2021	41	B
2	고척교	2종	1986, 2009	정밀점검	2021	42	B
3	광명교	법정외	2000	정밀점검	2021	17	B
4	역곡천교	법정외	2012	정밀점검	2021	21	B
5	구로1교	법정외	1978	정밀점검	2021	24	B
6	여의하류2교	법정외	2010	정밀점검	2021	23	B
7	목동교	2종	1968, 1986	정밀점검	2021	47	B
8	개화램프B교	법정외	2013	정밀점검	2021	16	B
9	가족길교	법정외	2016	정밀점검	2021	26	B

□ 설계 등 용역사항

용역명	용역 시행현황			금회용역과 관련사항	활용내용	비고
	용역 내용	시행기간	용역비 (백만원)
해 당 사 항 없 음