◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
	(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 총괄6회 및 3차 3회 설계변경도서 제출(마곡 재생수 현장)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『마곡지구 재생수 공급시설 설치공사』관련하여 총괄6회 및 3차공사 3회 설계변경도서를 붙임과 같이 제출 하오니 선처하여 주시기 바랍니다.

붙    임 : 1. 설계변경 검토의견서    1부.

2. 설계변경 도서        각1부.   끝.

(주)도화엔지니어링  대표이사  노   진   명

담당/ 부서장 심만보(02-6323-4821)   감리1부/부서장 심만보      감리본부/ 본부장 김연호

사장                            회장

협조자 :

시  행 : 도화(감리)2014-9215호(2014.06.02)            접수 :              (2014.   .   .)

우 135-280 서울특별시 강남구 대치동 942-1         / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)6323-4829 /전송 (02)515-0801              / 이메일 mbsim@dohwa.co.kr  / 공개

설계변경 검토의견서
공 사 명	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사
구 분	□자체의견 ■시공자제출 □사업주체요청
검토일자	2014년 06월 02일	공 종	■토목 □건축 ■기계 □전기 ■조경
작 성 자	보 조 감 리 원 권 기 오
검 토 자 (감 리)	회 사 명 : (주)도화엔지니어링 대 표 이 사 노 진 명 (인) 책 임 감 리 원 김 봉 주 (인)
건 명	총괄6회, 3차3회 설계변경 검토의견
1. 사업개요 1) 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사 2) 위 치 : 서울특별시 강서구 마곡동 91번지 3) 도급공사비 - 전 체 : 6,868,462,000원 - 3 차분 : 4,002,900,000원 4) 공사내용 - 재생수 처리시설 : 1단계 3,000㎥/일(생물여과공법) - 유입펌프장 - 관로공사(DCIP, Φ200～600) : L=1,343m - 기계, 조경공사 1식 5) 공사기간 - 전 체 : 2011. 11. 01. ∼ 2016. 07. 31 - 3 차분 : 2013. 03. 25 ∼ 2014. 06. 16 6) 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부 7) 감 리 자 : (주)도화엔지니어링, (주)유신 8) 시 공 자 : 유호산업개발(주)

2. 설계변경 내용

1) 공사비 증ㆍ감 내역

① 총괄분 공사비(6회변경)                                          (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
공급가액	6,159,000,000	6,105,400,000	-53,600,000
부가세	615,900,000	610,540,000	-5,360,000
물가변동	93,562,000	87,200,000	-6,362,000
도급액	6,868,462,000	6,803,140,000	-65,322,000
관급비	5,382,133,340	5,130,125,322	-252,008,018
폐기물처리비	77,447,000	46,378,200	-31,068,800
시운전비	306,000,000	306,000,000	-
총공사비	12,634,042,340	12,285,643,522	-348,398,818

② 3차분 공사비(3차3회변경)                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
공급가액	3,557,986,364	2,510,090,909	-1,047,895,455
부가세	355,798,636	251,009,091	-104,789,545
물가변동	89,115,000	37,900,000	-51,215,000
도급액	4,002,900,000	2,799,000,000	-1,203,900,000
관급비	2,828,091,010	1,342,900,000	-1,485,191,010
폐기물처리비	29,809,720	25,128,400	-4,681,320
총공사비	6,860,800,730	4,167,028,400	-2,693,722,330

2) 주요변경 내용(총괄6회)

구분	승인문서	변경내용	공사비(백만원)
			당초	변경	증감
1	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-18273 (2014.02.24)호	역세척수관로 403m ⇒ 394m 터파기 및 되메우기 740㎥ ⇒ 784㎥ 폐기물상차 - ㎥ ⇒ 115㎥ 아스콘포장 506㎡ ⇒ 461㎡	31	30	-1
2	방재시설부 -505 (2014.03.24.)호	수목식재 수량 변경 교목 49주 ⇒ 255주 관목 2,440주 ⇒ 2,400주 초화류 1,900본 ⇒ 2,150본 지피류 4,569 ㎡ ⇒ 4,542㎡	52	76	24
3	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-22468 (2014.04.09)호	현장사무실 기간연장 24개월 ⇒ 28개월 콘테이너 사무실 0개월 ⇒ 3개월 무근콘크리트 깨기 및 폐기물 상차 0㎥ ⇒ 66㎥	34	42	8
4	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-26492 (2014.05.16)호	관로구간 포장 및 경계석 교체 중기운반 0식⇒ 1식 폐기물상차 115㎥ ⇒ 400㎥ 아스팔트 포장파취 660㎥ ⇒ 385㎥ 아스팔트 표층, 기층 포장 2,978㎡ ⇒ 2,008㎡ 보차도경계석 철거 52m ⇒ 103m 보차도경계석 설치 75m ⇒ 135m 차선도색 - ㎡ ⇒ 48.84㎡ 절삭후 덧씌우기 - a ⇒ 48.84㎡11.42a 아스팔트 16드럼 ⇒ 13드럼 혼합골재 1,149㎥ ⇒ 1,229㎥	39	46	7
5	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-26494 (2014.05.16)호	유입펌프장 삭제 슬리브 플랜지 반영 관로공사 유입관로 856m ⇒ 734m 역세척수 관로 394m ⇒ 394m 유출관로 24m ⇒ 24m 제수변, 공기변 각 1개소 삭제 유입수 임시공급배관 – m ⇒ 99m	475	354	-121
6	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-27070 (2014.05.22)호	조경석 쌓기 – ton ⇒ 165ton 조경석 철거쌓기 – ton ⇒ 69.2ton 외부난간 설치 – m ⇒ 92m 정원석 놓기 26.7 ton ⇒ - ton 고재처리 – ton ⇒ 73.359ton	3	13	10
7	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-27611 (2014.05.27)호	콘크리트타설 3,690㎥ ⇒ 3,725㎥ 난간설치(수평부) 96m ⇒ 146m, (경사부) 82m ⇒ 82m 사다리(STS316) -m ⇒ 29m 출입문 6개소 ⇒ 10개소 그레이팅(1700*4000) 1개소, (500*1200) 12개소 반영 STS COVER(1000*1000) 1개소, (1100*1100) 1개소 반영 모체침투성방수 4,952㎡ ⇒ 5,231㎡ 노출콘크리트 마감 42㎡ ⇒ 136㎡ 흡음판설치 삭제 1,117㎡ ⇒ - ㎡ 시험굴착 - 개소 ⇒ 24개소 수압시험 - 회 ⇒ 5회 유용토 운반 31,945㎥ ⇒ 29,113㎥ 포장가복구 - ㎡ ⇒ 20㎡	213	222	9
8	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-27628 (2014.05.27)호	관사앞 도로의 노후된 경계석 교체(L=73m) 및 노후 휀스 교체(44경간)	-	12	12
9	도화(서남마곡) 14-068	강관동바리0~4.2m11,029㎥⇒5,539㎥ 강관동바리4.2~7.2m 3,738㎥ ⇒ 682㎥ 강관동바리7.2이상 714㎥ ⇒ 714㎥ 동바리수평재 5,051㎡ ⇒ 1,795㎡ 조립식강관동바리 0 ⇒ 7,881㎥	133	151	18
10	순공사비 계		980	946	-34
11	제 경 비 (VAT포함)		470	445	-25
12	물가변동		93	87	-6
13	도급공사비 계		1,543	1,478	-65

3) 주요변경 내용(3차3회)

구분	승인문서	변경내용	공사비(백만원)
			당초	변경	증감
1	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-18273(2014.02.24)호	역세척수관로 403m ⇒ 394m 터파기 및 되메우기 740㎥ ⇒ 784㎥ 폐기물상차 - ㎥ ⇒ 115㎥ 아스콘포장 506㎡ ⇒ 461㎡	31	30	-1
2	방재시설부 -505 (2014.03.24.)호	수목식재 수량 변경 교목 49주 ⇒ 255주 관목 2,440주 ⇒ 2,400주 초화류 1,900본 ⇒ 2,150본 지피류 4,569 ㎡ ⇒ 4,542㎡	52	76	24
3	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-22468(2014.04.09)호	현장사무실 기간연장 24개월 ⇒ 28개월 콘테이너 사무실 0개월 ⇒ 3개월 무근콘크리트 깨기 및 폐기물 상차 0㎥ ⇒ 66㎥	34	42	8
4	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-26492(2014.05.16)호	관로구간 포장 및 경계석 교체 중기운반 0식⇒ 1식 폐기물상차 115㎥ ⇒ 400㎥ 아스팔트 포장파취 660㎥ ⇒ 385㎥ 아스팔트 표층, 기층 포장 2,978㎡ ⇒ 2,008㎡ 보차도경계석 철거 52m ⇒ 103m 보차도경계석 설치 75m ⇒ 135m 차선도색 - ㎡ ⇒ 48.84㎡ 절삭후 덧씌우기 - a ⇒ 48.84㎡11.42a 아스팔트 16드럼 ⇒ 13드럼 혼합골재 1,149㎥ ⇒ 1,229㎥	39	46	7
5	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-26494(2014.05.16)호	유입펌프장 삭제 슬리브 플랜지 반영 관로공사 유입관로 856m ⇒ 734m 역세척수 관로 394m ⇒ 394m 유출관로 24m ⇒ 24m 제수변, 공기변 각 1개소 삭제 유입수 임시공급배관 – m ⇒ 99m	475	291	-184
6	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-27070(2014.05.22)호	조경석 쌓기 – ton ⇒ 165ton 조경석 철거쌓기 – ton ⇒ 69.2ton 외부난간 설치 – m ⇒ 92m 정원석 놓기 26.7 ton ⇒ - ton 고재처리 – ton ⇒ 73.359ton	3	13	10
7	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-27611(2014.05.27)호	콘크리트타설 3,690㎥ ⇒ 3,725㎥ 난간설치(수평부) 96m ⇒ 146m, (경사부) 82m ⇒ 82m 사다리(STS316) -m ⇒ 29m 출입문 6개소 ⇒ 10개소 그레이팅(1700*4000) 1개소, (500*1200) 12개소 반영 STS COVER(1000*1000) 1개소, (1100*1100) 1개소 반영 모체침투성방수 4,952㎡ ⇒ 5,231㎡ 노출콘크리트 마감 42㎡ ⇒ 136㎡ 흡음판설치 삭제 1,117㎡ ⇒ - ㎡ 시험굴착 - 개소 ⇒ 24개소 수압시험 - 회 ⇒ 5회 유용토 운반 31,945㎥ ⇒ 29,113㎥ 포장가복구 - ㎡ ⇒ 20㎡	213	222	9
8	방재시설부 2014 업무연락전 SMIH-14-27628 (2014.05.27)호	관사앞 도로의 노후된 경계석 교체(L=73m) 및 노후 휀스 교체(44경간)	-	12	12
9	도화(서남마곡) 14-068	강관동바리0~4.2m11,029㎥⇒5,539㎥ 강관동바리4.2~7.2m 3,738㎥ ⇒ 682㎥ 강관동바리7.2이상 714㎥ ⇒ 714㎥ 동바리수평재 5,051㎡ ⇒ 1,795㎡ 조립식강관동바리 0 ⇒ 7,881㎥	133	151	18
10	내역변경	기계설비 내역변경	679	-	-679
11	순공사비 계		1,659	883	-776
12	제 경 비 (VAT포함)		747	370	-377
13	물가변동		89	38	-51
14	도급공사비 계		2,495	1,291	-1,204

3. 종합의견

- 상기 공사의 전면책임감리 업무를 수행함에 있어 설계변경 대하여 종합적으로 검토한  결과 실정보고 승인된 사항으로 반영하여 설계변경 하였고,

- 전체 공사 중 일부공종 삭제 및 수량 감소로 감액 계약 변경하고, 3차공사비중 기계공      사가 작업 중지 후 2015년 재개될 예정으로 다음 차수로 내역 변경하였음.

- 상기 변경 사항은 법적요건 및 현장여건과 일치하므로 설계변경이 타당한 것으로 판단됨.

붙  임 : 설계변경서 1식.     끝.