◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
	(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 총괄 14회 및 8차1회 설계변경예산서 제출

1. 도시기반시설본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」과 관련하여 총괄 14회 및 8차공사 1회 설계변경도서를 붙임과 제출 하오니 선처하여 주시기 바랍니다

붙  임 : 1. 설계변경검토의견서 1부

2. 변경설계도서     각1부. 끝.

(주)도화엔지니어링  대표이사  노   진   명

담당/ 부서장 전항배(02-6323-3500)    감리1부/부서장 전항배

시  행 : 도화(감리)2016-11141호(2016.12.09)         접수 :            (2016.   .   .)

우 06178 서울특별시 강남구 삼성로 438           /홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)6323-4829 /전송 (02)515-0801            / 이메일 chunhb@dohwa.co.kr  / 공개

설계변경 검토의견서
공 사 명	남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
구 분	□자체의견 ■시공자제출 □사업주체요청
검토일자	2016년 12월 09일	공 종	■토목 □건축 ■기계 □전기 □조경
작 성 자	보 조 감 리 원 장 순 건
검 토 자 (감 리)	대 표 이 사 노 진 명 (인) 책 임 감 리 원 김 봉 주 (인)
건 명	총괄 14회 및 8차1회 설계변경 검토의견
1. 사업개요 1) 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 2) 위 치 : 서울특별시 강서구 마곡동 91번지 3) 공 사 비 - 전 체 : 312,237,000,000원, - 8차공사 : 43,325,540,000원 4) 공사내용 - 고도처리 : 1,150,000㎥/일(MLE공법), - 시설현대화 : 360,000㎥/일(4-Stage BNR공법) - 기존시설활용 : 120,000㎥/일(표준활성슬러지공법) - 상부 공원화시설, 홍보관 5) 공사기간 - 전 체 : 2009. 11. 09. ∼ 2017. 02. 28 - 8 차 : 2016. 03. 25. ∼ 2016. 12. 31 6) 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부 7) 감 리 자 : (주)도화엔지니어링, (주)유신 8) 시 공 자 : 대림산업(주), (주)태영건설, (주)한진중공업, (주)서한기술공사 한국개발(주), (주)삼진일렉스 2. 관련법규 검토 - 입찰안내서 제3장 3.1 공사계약 일반조건 제21조 ⑥항 ⑥ 제2항 각호의 사유 및 제3항 각호의 사유에 해당되지 않는 경우로서 현장상태와 설계서의 상이 등으로 인하여 설계변경을 하는 경우에는 전체공사에 대하여 증․감되는 금액을 합산하여 계약금액을 조정하되, 계약금액을 증액할 수는 없다

2. 설계변경 내용

1)공사비 증(감) 내역

① 전체(14회) 공사비                                               (단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
순공사비	195,923	197,540	1,617
제경비	79,225	75,639	3,586
물가변동	33,778	33,712	66
계약금액 조정분	3,311	5,346	2,035
합 계	312,237	312,237	0

② 8차분 공사비                                                   (단위:백만원)

구 분	1회			비 고
	당 초	변 경	증, 감
순공사비	26,820	25,279	1,541
제경비	10,802	9,849	953
물가변동	5,703	4,919	784
합 계	43,325	40,047	3,278

2)주요변경 내용(총괄)

구분	승인문서	변경내용	공사비(백만원)
			당초	변경	증(감)
계약금액내조정	방재시설부-9184 (2015.07.10.)	․부력방지앵커 길이증가	145	242	97
	도시기반시설본부-16-1734 (2016.08.24.)	․시설현대화 토공사 수량 변경	2,366	2,446	80
	도시기반시설본부-16-9676 (2016.11.09.)	․시설현대화 구조물 기초 공법 개선	1,415	2,043	628
	설비부-14498호 (2015.11.18.)	․교반기 사양 변경	500	500
	도화(서남)2015-393호 (2015.12.01.)	․이차침전지 세척수 배관 변경	79	69	10
	설비부-8266호 (2016.05.25.)	․농축기 사양 변경	1,933	3,242	1,309
	설비부-8266호 (2016.05.25.)	․바닥배수펌프 사양 변경	25	47	22
	설비부-8266호 (2016.05.25.)	․생물반응조 지배수펌프 추가 설치	144	154	10
	설비부-8266호 (2016.05.25.)	․시설현대화 약품 변경	48	13	35
	물가변동금액		33,778	33,712	66
	계약금액조정분		3,311	5,346	2,035
	소계		312,237	312,237

4. 주요변경 내용(8차1회)

구분	승인문서	변경 내용	공사비(백만원)
			당초	변경	증(감)
8 차 공 사	물재생시설과-15565 (2016.11.03.) 서남물재생센터 시설현대화사업 예산 재배정(시설비) 도시기반시설본부 -16-10299호 (2016.11.28.) 8차공사 설계변경승인	토공사	1,226	1,275	49
		구조물공사	18,317	15,256	3,061
		부대공사	1,845	23,123	278
		기계 배관공사	2,611	2,707	96
		기계 기자재공사	2,327	3,621	1,294
		전기공사	494	297	197
	직접공사비		2,6820	25,279	1,541
	제경비		10,802	9,879	923
	물가변동비		5,703	4,919	784
	도시기반시설본부 -16-9103호 (2016.10.24.)	건설폐기물처리용역비 설계변경 반영	0	30	30
계			43,325	40,047	3,278

■검토 결론.

○ 상기 설계변경 대하여 종합적으로 검토한 결과 실정보고 승인된 사항이 반영되어 설계변경 하였고,

○ 총괄 14회 변경은 공사계약일반조건 제21조 ⑥항에의거 실정보고 승인 사항을 반영하여 전체 계약금액 증감없이 계약금액내에서 조정하여 설계변경코져 하며,

○ 8차공사는 국비 미배정(3,248백만원) 사항과 건설폐기물 처리용역 변경계약에 대한 설계변경 승인사항(30백만원)을 계약금액에서 감 조정하여 설계변경 코져 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 설계변경서 1식.  끝.

서남물재생센터고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김 봉 주 (인)