동부간선도로 확장공사 추진현황

현재 4차로로 운영중인 월계1교～의정부시 구간을 왕복 6차로로 확장하여 병목으로 인한 상습정체 해소 및 서울외곽순환도로와 연결되는 간선도로망 구축으로 동북부지역 통행시간 단축 및 서울균형발전 도모

1		사업개요

○ 위    치 : 노원구 월계1교 ～ 의정부시계

○ 시설규모 : 폭 4 → 6차로, 연장 6.85km(서울시 1.4km, 광역도로 5.45km)

- 지하차도 5개소 3,372m(초안산, 녹천, 도봉, 상도, 장암)

- 옹벽(5,002m) 및 보도육교 1개소(상일) 설치 등

○ 공사기간 : '07.10. ~ '17.12.

○ 총사업비 : 3,835억원('15년 예산 366억원, 기투자 2,544억원) - 1공구 제외

2		추진실적

○ 1공구 (공정률 : 계획 24% / 실행 24%)

- 월계1교 U-TYPE(양방향)확장 완료(2차로→3차로)

- 경원선 철도이설에 따른 공사일시중지('12. 1. 〜 '16.12.)

○ 2공구 (공정률 : 계획 52% / 실행 53.8%)

- 도봉지하차도(총연장1,900m) 1,380m 완료

· 육상구간 : 780m 중 260m 완료, 520m 시공중

· 하상구간 : 1,120m 완료

○ 3공구 (공정률 : 계획 54.2% / 실행 51.5%)

- 상도지하차도 및 상일보도육교 설치 완료, 제외지 옹벽 1,368m 완료

- 방음벽 730m 완료, 장암지하차도 및 수락고가차도 확장공사 중

3		향후계획

○ '17.12. : 전구간 단계별 개통예정 및 시설물 인수․인계

위치도 및 현황사진

현황사진
<초안산 주변>	<노원구 확장구간>