사업수행성과 평가표

(1) 건설공사 개요

		관리번호	서울시 상수도 사업본부-2017-광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설공사
		준 공 일	2012. 12. 26				평 가 일		2017.11
공사개요
공 사 명	광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설공사
공사규모	-광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설공사 (성능개선 40만톤/일, 고도정수처리 25만톤/일, 환경이미지개선공사 1식)
공사성격	□신규 ■개보수․현대화 □확장․증설 □기타
공사비지급방식	■총액계약 □단가계약 □실비정산 □기타
발주기관	서울시 상수도사업본부
	평가담당자(부서/직위/성명)			시설과/주무관/윤걸
위 치	경기도 하남시 서하남로 293
공사개요	-기존정수장 규모조정 및 성능개선공사 : 80만톤/일→40만톤/일 -고도정수처리시설 : 25만톤/일 -환경이미지 개선공사(리모델링) : 1식
입찰․계약 방식
도급방법	□단독 ■공동도급(공동이행방식, 분담이행방식, 주계약자관리방식)
계약성질	■장기계속공사 □장기계속공사→계속비 전환공사(전환시점 : ) □기타공사()
입찰방식	■적격심사□최저가□턴키□대안□기타( )
계약방식	□제한■일반경쟁□지명경쟁□수의□기타( )
사업 참여자
구 분	건설(용역)업체명				대 표	발주청				비 고
						부서		담당자
타당성조사	(주)유신코퍼레이션				조수원	계획설계과		한명석		고도정수처리
기본설계	-				-	-		-		-
기본 및 실시설계	(주)신우엔지니어링 외2개사 (동일/동부)				문정석	계획설계과		한명석		고도정수처리
기본 및 실시설계	(주)도화종합기술공사 외1개사(범한)				문병권	생산관리과		김인규		성능개선
시 공	남해종합건설(주), 남해종합개발				김형석 김응서	시설과		고신석		성능개선 고도정수처리 환경이미지개선
감 리	(주)한국종합기술 (주)한국건설관리공사				이강록 김해수	급수부 시설과		김도섭		전면책임감리
기 타	에이스톤엔지니어링(주)				이영순	시설과		윤걸		사후평가

(2) 건설사업 수행성과평가

가. 정량적 성과평가

사업단계 평가항목		예비타당성조사	타당성조사	기본설계	실시설계	보상	시공
용역비 및 공사비 (단위:백만원)	계약금액	-	141	-	1,659	-	81,570
	추정공사비	-	104,079	-	101,937	-	-
	추정공사기간	-	96개월	-	60개월	-	-
	준공금액	-	141	-	1,659	-	81,570
공 정	계약공기	-	10개월	-	16개월	-	2009년 02월 26일 ~ 2012년 02월 26일 (36개월)
	실제공기	-	-	-	-	-	2009년 02월 26일 ~ 2012년 12월 26일 (46개월)
설계변경 (물가변동제외)	건 수	-	-	-	-	-	8
	증 감 액	-	-	-	-	-	4,077
	계약자 귀책금액	-	-	-	-	-	-
재시공 금액		-	-	-	-	-	-

나. 사업수행평가 (종합)

평가분야	평가항목	평가지표	평가결과
사업 수행성과	사 업 비	사업비 증감율	계획 : 104,079백만원 → 실제 : 81,570백만원(증감율 –21.62%)
		보상비 증감율	-
	사업기간	사업기간 증감율	계획 : 96개월 → 실제 : 74개월(증감율 –23.18%)
사업비 증감율의 계획은 투․융자심사상의 사업비(성능개선), 타당성조사상 사업비(고도정수처리), 기본계획 사업비(환경이미지 개선사업)를 적용하는 것이 타당하다고 판단되어 본 평가에서는 적용․비교 수행하였음 사업기간 증감율의 계획과 실제는 광암정수장 성능개선공사 및 고도정수처리시설공사, 환경이미지 개선사업의 추정기간 합과 실제 설계 및 시공기간을 적용․비교 수행하였음