문서번호	미생물검사과-1042
결재일자	2017.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장		서울물연구원장
협 조
	총무과장
	주무관

상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축계획

2017. 7.

서울물연구원 수질분석부

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	기후대기과 전기차 구매지원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축 계획

상수원 수질사고와 수도민원의 현장 실시간 분석서비스를 제공하여, 아리수 우수성 및 품질관리 제고하기 위하여 이동형 상시 수질모니터링 시스템을 구축함

Ⅰ		사업개요

□ 관련근거

□ 「환경정책기본법」제22조 (환경상태의 조사･평가 등)

□ 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제9조 및 시행규칙 제22조, 제23조 (시･도지사가 설치･ 운영하는 측정망의 종류 등)

□ 「부시장님 지시사항」(2월, 이동차 활용 아리수 품질확인제 효율적 활용방안 모색)

□ 추진목적

□ 상수원 수질사고(68건/’15), 수도민원(3,400건/’15), 조류대응으로 수돗물의 불안감 해소

□ 세계적인 고품질 아리수 우수성 및 체계적인 수질관리의 현장학습 등 홍보활용

수질사고 신속대응	수돗물 안심서비스	현장학습 및 홍보

□ 사업기간 : 2년간 (＇17 ~＇18)

□ 사업예산 : 4.4억원 (1차년도 – 2.6억원, 2차년도 – 1.8억원)

□ 예산과목 ; 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비

□ 주요구성 : 3개부문 (수질측정기 및 검사기, 차량 및 부대시설, 통신시설 등)

Ⅱ		세부추진계획

□ 연차별 추진계획

□ 1차년도 (2017년) : 기본항목, 이동차량 등 운영기반 확보

- 소요예산 ; 260,000천원

- 기본 수질 측정기 ; TN, TP, TOC, 수도꼭지 수질검사기 등 현장 수질모니터링 탑재

- 차량 및 운영기반 ; 채수 및 여과시설, 이동차량 개조, 전기 및 보안시스템 등 확보

- 통신 및 관제시스템 ; 무인설비보안, 홍보영상 표출 및 관제 시스템 등 기반 구축

□ 2차년도 (2018년) : 강화항목 및 관제 시스템 확보

- 소요예산 ; 180,000천원

- 강화 수질 측정기 ; 오일, 세정제, 클로로필 a 등 사고대비 수질모니터링 탐재

- TMS 등 관제시스템 등 ; 수질자료의 종합적인 분석과 표출 시스템, 관리운영기반 강화

구분	세부구성	1차년도	2차년도
온라인 자동 측정기	TN, TP, TOC, Multi자동측정기	100%	-
	Oil, ABS, Chlorophyll a	-	100%
수돗물 검사기	Incubator, Clean Bench, 분광광도계	100%	-
부대설비	수조, 여과필터, 채수펌프, 초순수 제조장치	100%	-
통신설비	데이터로거(Data Logger)	20%	80%
	무선통신 RCS S/W
차량 및 보안설비	이동형 차량	50%	50%
	CCTV감시시스템
	홍보용 영상설비
기타 대관업무	전원(한국전력)확보	50%	50%
	차량면허신청

□ 구매방법 : 지명경쟁입찰 (조합추천)

Ⅲ		행정사항

□ 이동형 수질 모니터링 차량과 보조차량 (전기차량) 구매시 신규정수 확보

※ 보조차량(전기차량) 구매 (2017년도 기후대기과 업무용전기자동차 구매지원)

□ 구축완료 후 물품관리시스템 및 림스 등 등록관리.  끝..