서울형품셈 개선 내용

① 클램프 이용 공중비계

② SGR 그라우팅을 위한 지반천공

③ 모르타르 바르기(기계)

계 약 심 사 과

▢ 서울형품셈 개선 품(3 건)

① 클램프 이용 공중비계

[ 당   초 ]

[ 개   선 ]

‣인력 및 장비구성                   (단위:㎡)

구   분

규격

단위

수  량

비 계 공

보통인부

트럭탑재형크레인

10톤

인

인

hr

0.048

0.016

0.041

[주]

① 본 품은 클램프를 이용하여 공중비계를 교량하부에 설치하는 품이다

② 자재의 손율은 다음과 같다.

구 분	손율(%)
	클램프,강관비계, 와이어로프	조임 및 이음철물	합판
3개월	6	12	12
6개월	10	20	16
12개월	19	38	25

③ 크레인 규격은 현장여건에 따라 조정 가능하다

④ 해체 품은 설치 품의 70%로 별도 계상한다.

‣인력 및 장비구성                   (단위:㎡)

구   분

규격

단위

수  량

비 계 공

보통인부

트럭탑재형크레인

10톤

인

인

hr

0.062

0.005

0.067

[주]

① 본 품은 클램프를 이용하여 공중비계를 설치하는 품으로 교량하부에서       고소차(크레인)를 사용하는 경우에 적용한다

② 자재의 손율은 다음과 같다.

구 분	손율(%)
	클램프,강관비계, 와이어로프	조임 및이음철물	합판
3개월	6	12	12
6개월	10	20	16
12개월	19	38	25

③ 크레인 규격은 현장여건에 따라 조정 가능하다

④ 보호막 설치품은 별도 계상한다

⑤ 교통처리가 필요한 경우 교통처리원(신호수)을 별도 계상할 수 있다

⑥ 현장접근이 열악한 경우 장비진입 및 자재운반 등 비용을 별도 계상할 수 있다

④ 해체 품은 설치 품의 70%로 별도 계상한다.

② SGR 그라우팅을 위한 지반천공

[ 당   초 ]

[ 개   선 ]

세 부 공 종			단위	수량
작업시간	준비시간 T1		분/공	3.0
	천공시간 T2	토사	분/m	0.63
		풍화암	분/m	0.9
	이중관 ROD 삽입시간 T3		분/공	3.3
인 력	건설기계운전사		인	1
	보 링 공		인	1
	특별인부		인	1
장 비	지반천공기(165HP)		대	1
기 타	- 작업소요시간 T=(T1+T2+T3)/f - T1(준비, 인발, 이동) : 분/공 - T2(천공시간) : ∑( L₁×t₁)/공 · L₁: 천공연장(m) · t₁ : 천공시간(분/m당) - T3(이중관ROD 삽입시간) : 분/공 - 작업계수 f · 0.8 : 현장이 넓고 장애물이 없어 장비운영이 용이한 경우 ‧ 0.7 : 현장이 협소하나, 장애물이 없어 장비운영이 용이한 경우
[주] ① 본 품은 그라우팅(약액주입)을 위한 지반 천공품이다. ② 본 품은 천공 구경 Ø73㎜에 적용한다. ③ 지반천공기(102마력) 기계손료 계수는 크롤러드릴(110kw)을 준용한다 ④ 케이싱, 비트 등 소모재료 손료는 별도계상한다

세 부 공 종			단위	수량
작업시간	준비시간 T1		분/공	3.97
	천공시간 T2	토사	분/m	1.16
	이중관 ROD 삽입시간 T3		분/공	3.12
인 력	건설기계운전사		인	1
	보 링 공		인	1
	특별인부		인	1
	보통인부		인	1
장 비	지반천공기(165HP)		대	1
기 타	- 작업소요시간 T=(T1+T2+T3)/f - T1(준비, 인발, 이동) : 분/공 - T2(천공시간) : ∑( L₁×t₁)/공 · L₁: 천공연장(m) · t₁ : 천공시간(분/m당) - T3(이중관ROD 삽입시간) : 분/공 - 작업계수 f · 0.8 : 현장이 넓고 장애물이 없어 장비운영이 용이한 경우 ‧ 0.7 : 현장이 협소하나, 장애물이 없어 장비운영이 용이한 경우 · 0.6 : 현장이 협소하고 장애물이 있어 장비운영이 어려운 경우
[주] ① 본 품은 그라우팅(약액주입)을 위한 지반(토사,풍화암) 천공품이다. ② 본 품은 천공 구경 Ø70～Ø125㎜에 적용한다. ③ 지반천공기(165마력) 기계손료 계수는 크롤러드릴(110kw)을 준용한다 ④ 케이싱, 비트 등 소모재료 손료는 인력품의 9%를 계상한다 ⑤ 천공장비 조립 및 해체는 별도 표준품셈(5-2-1, 어스앵커공법) 준용한다

③ 모르타르 바르기(기계)

[ 당   초 ]

[ 개   선 ]

구 분	규 격	단위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부	배합 및 비빔	인인	0.436 0.436
콘크리트공 미 장 공 보 통 인 부	뿜칠 및 마감미장	인인인	0.436 1.308 0.436
믹 서 펌 프 공기압축기 발 전 기	200L 7.5Kw(10HP) 10HP 45Kwha(56HP)	hr hr hr hr	3.489 3.489 3.489 3.489
[주〕① 본 품은 노후 콘크리트 제거 후 기계를 이용하여 콘크리트 보수 몰탈 바르기에 적용하는 품이다. ② 본 품은 벽체, 천정에 적용한다. ③ 본 품은 할증 미포함으로 별도 가산할 수 있다. ④ 일 작업량 : 2.293㎥/일로 한다.

구 분	규 격	단위	수 량
특 별 인 부 보 통 인 부	배합 및 비빔	인인	0.468 0.468
콘크리트공 미 장 공 보 통 인 부	뿜칠 및 마감미장	인인인	0.468 1.403 0.468
믹 서 펌 프 공기압축기 발 전 기	200L 7.5Kw(10HP) 10HP 45Kwha(56HP)	hr hr hr hr	3.742 3.742 3.742 3.742
[주〕① 본 품은 노후 콘크리트 제거 후 기계를 이용하여 콘크리트 보수 몰탈 바르기에 적용하는 품으로 마감미장을 포함한다. ② 본 품은 벽체, 천정에 적용한다. ③ 본 품은 할증 미포함으로 별도 가산할 수 있다. ④ 일 시공량 : 2.138㎥/일로 한다.