【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 김구		요청일		2015년 2월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
공사개요	공사규모		도로(4~10차로,연장7.96km), 지하차도(4개소):2,790m, 교량(2개소):540m
	공사기간		2002 . 07 . 03 ~ 2018 . 07 . 31
	감 리 사		㈜동명기술공단건축사사무소
	설 계 사		㈜수성엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)외 1개사
자문 안건명			과천시 도시계획변경에 따른 설계비 반영				요청금액		증286,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 과천시구간 도시계획변경에 의한 실시계획인가관련 설계비 반영
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 과천시구간 도시계획변경에 의한 실시계획인가관련 설계비 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 설계비 1식 - 증 감 : 설계비 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : -천원 - 변 경 : 286,000천원 - 증 감 : 286,000천원 ▪ 설계변경 주요 공종 • 설계비 1식 - 본선 : 보도+부체도로+종단변경(L=0.55km) - 매헌로연결도로 신설 4차로(L=0.35km) - 주암교차로 및 주암마을접속로 신설 2~4차로 (L=0.66km)
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
계약금액	222,995,000천원	계약일	2002.06.28	시공사	롯데건설(주)외 1개사
공사기간	2002. 7. 3 ~ 2018. 7. 31	낙찰율	59.714%	설계자	㈜수성엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동명기술공단 건축사사무소
공사규모	-도로확장(폭원 4~10차로, 연장7.96km) 지하차도(4개소):2,790m, 교량(2개소):540m			※ 작성자 : 김 구(☎ 3708-8667)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		• 설계비 1식 -본선[보도+부체도로+종단변경 (L=0.55km)] -매헌로연결도로 신설 4차로 (L=0.35km) -주암교차로 및 주암마을접속로 신설 2~4차로 (L=0.66km)	1식
공 사 비	-		286,000천원	(증)286,000천원
적 용 요 율	-		79.855% (협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	79.855% (협의율 적용)
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 토목부-498호(2015.01.09.)
	관련규정	공사계약 일반조건 제19조, 제19조의 5
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	과천시구간 도시계획변경에 의한 실시계획인가관련 설계비 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인 요청 - 동기강 2014-382호(2014.12.15.)

· 실정보고 승인 – 토목부-498호(2015.01.09.)

· 실정보고 승인 통보 – 도시기반시설본부262-15-413호(2015.01.20.)