【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 김 구		요청일		2018년 04월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사
공사개요	공사규모		-폭원 4-10차도 , 연장 7.96 KM -지하차도(4개소) : 2,790 M -교량(2개소) : 540 M
	공사기간		2002. 07. 03. ~ 2018. 07. 31.
	감 리 사		㈜동명기술공단건축사사무소
	설 계 사		㈜수성엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)외 1개사
자문 안건명			매헌지하차도 부력방지앵커 실측 지하수위 반영				요청금액		감) 131,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 매헌지하차도 지하수위 실측치를 적용하여 지하수위 현황에 맞게 부력방지앵커 수량 및 길이 조정.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 매헌지하차도 부력방지앵커의 당초 설계는 지하수위 추정치를 사용하여 구조계산 되었으나, 지하수위 실측치를 적용하여 지하수위 현황에 맞게 부력방지앵커 수량 및 길이를 조정하는 것은 타당함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 부력방지앵커 지하수위 추정치 적용 - 변 경 : 부력방지앵커 지하수위 실측치 적용 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 영구앵커 281공, 그리우팅 3,326M, 천공 3,094M - 변 경 : 영구앵커 242공, 그리우팅 2,656M, 천공 2,441M					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 602,672 천원 - 변 경 : 471,672 천원 - 증 감 : 감) 131,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 매헌지하차도 부력방지앵커 실측 지하수위 반영
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사
계약금액	239,890,000 천원	계약일	2002.06.28	시공사	롯데건설(주)외1개사
공사기간	2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.	낙찰률	59.714%	설계자	㈜수성엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜동명기술공단 건축사사무소
공사규모	폭원 4-10차도 , 연장 7.96 KM 지하차도(4개소) : 2,790 M 교량(2개소) : 540 M			※ 작성자 : 김 구 (☎3708-8664)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 부력방지앵커 지하수위 추정치 적용		- 부력방지앵커 지하수위 실측치 적용
공 사 비	602,672 천원		471,672 천원	감) 131,000 천원
적 용 요 율	기계약		79.855% (협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	79.855%
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-18-2830(2018.03.28.)
	관련규정	공사계약 일반조건 제19조 , 제19조의 2
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	매헌지하차도 부력방지앵커 실측 지하수위 반영
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인요청 – 동기강 2018-93호(2018.03.22.)

· 실정보고 승인 – 토목부-5196(2018.03.28.)

· 실정보고 승인 통보 – 도시기반시설본부-18-2830(2018.03.28.)