【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 김 구		요청일		2018년 8월 일
공 사 명	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사
공사개요	공사규모		- 중앙버스전용차로 2.8km - 정류장 4개소
	공사기간		2017. 12. 22. ~ 2018. 8. 31.
	감 리 사		㈜동성엔지니어링
	설 계 사		㈜서우TEC
	시 공 사		㈜성림이엔씨
자문 안건명			보도 복구 수량 및 포장재 변경				요청금액		증) 257,450천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 차도확장(보도후퇴) 구간에 보도 전폭 철거 후 투수블록으로 복구하도록 설계되었으나, 당초 판석으로 포장되어 있어 자치구(서초, 관악구) 협의 결과 판석으로 포장 복구 요청함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 보도 셋백으로 인한 보도 복구 실제 시공수량 반영 및 보도 포장재 변경은 적정함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 투수블록으로 보도 전폭 복구 - 변 경 : 화강판석으로 보도 전폭 복구 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 보도블록 걷기 2,286㎡, 보도포장 2,150㎡ - 변 경 : 판석철거 1,823㎡, 판석포장 1,514㎡					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 71,610 천원 - 변 경 : 329,060 천원 - 증 감 : 증) 257,450 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공 및 포장공
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사
계약금액	2,420,076 천원	계약일	2017. 12. 13.	시공사	㈜성림이엔씨
공사기간	2017. 12. 22.~2018. 8. 31.	낙찰률	86.758%	설계자	㈜서우TEC
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 주계약자공동(●), 계속비공사			감리자	㈜동성엔지니어링
공사규모	- 중앙버스전용차로 2.8km 정류장 4개소			※ 작성자 : 김 구 (☎3708-8664)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 보도 투수블록 포장		- 보도 화강판석 포장
공 사 비	71,610 천원		329,060 천원	증) 257,450 천원
적 용 요 율	기계약		93.379% (협의율)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	설계 오류에 의한 신규공종
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-18-8816(2018. 8. 14.)
	관련규정	공사계약 일반조건 제19조 , 제19조의 2
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	보도 복구 수량 및 포장재 변경
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인요청 – 동작건 2018-116(2018. 8. 1.)

· 실정보고 승인 – 토목부-14168(2018. 8. 14.)

· 실정보고 승인 통보 – 도시기반시설본부-18-8816(2018. 8. 14.)