【별 첨 1】

설계변경 위원회 자문요청의뢰

문서번호		요청부서		방재시설부		요청일		2016년 9월 일
공 사 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(자전거도로 설치공사)
공사개요	공사규모		- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일 - 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일
	공사기간		2016. 10. ~ 2017. 04
	감 리 사		㈜한국종합기술 외 1개사
	설 계 사		㈜앨토컨설턴트
	시 공 사		지에스건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			중랑물재생센터 시설현대화 자전거도로 설치공사 설계변경 件				요청금액		439,641 천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 기 조성된 중랑천 자전거도로와 중랑물재생센터 시설현대화 자전거도로를 연결하여 중랑천 자전거도로 이용객과 지역주민의 중랑물재생센터로의 원활한 진입로 확보로 중랑물재생센터 시설현대화와 재사용플라자 사업과 연계로 사업효과 극대화 및 시민이용 활성화를 하는데 그 목적이 있다
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 원설계자 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 토공 : 흙쌓기(토사) : 116㎥, 터파기 : 328㎥, 되메우기 : 125㎥ - 구조물공 : 종배수관(Φ450) : 110m - 포장공 : 아스팔트포장 : A=2,838㎡, 보도블럭포장(투수블럭) : A=258㎡, 보차도경계석(200x250) : L=171m, 도로경계석 (100x100) : L=268m, 디자인난간(H=1.030m) : L=88경간 - 부대공 : 식재이설 : 407주, 교통표지판 및 도로반사경 : 29주, 과속방지턱 : 3개소, 휀스설치 : L=15m, 전신주이설 : 1식, CCTV설치 : 1식 ▪ 물량증감내역 - 자전거도로 설치 : L=409.6m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 439.641 천원 - 증 감 : 439.641 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공(흙쌓기, 터파기, 되메우기등) - 포장공(아스팔트 및 보도블럭 포장, 디자인난간등) - 부대공(식재이설, 교통표지판 및 도로반사경등)
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부 4. 설계내역서 1부					▪ 공사예정시기 - 2016. 10월 ▪ 소요관급자재 - 대상 사업아님

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
계약금액	335,283,000천원	계약일	2009. 2. 12.	시공사	지에스건설㈜ 외 3개사
공사기간	2009. 2. 13 ~ 2017. 4. 28	낙찰율	해당없음(T/K)	설계자	㈜삼안 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	㈜한국종합기술 외 1개사
공사규모	• 시설현대화 25만톤 • 고도처리개량 88만톤 • 중랑천용수공급시설 20.3만톤

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		자전거도로 설치 : L=409.6m(증) - 토공 : 흙쌓기(토사) : 116㎥, 터파기 : 328㎥, 되메우기 : 125㎥ - 구조물공 : 종배수관(Φ450) : 110m - 포장공 : 아스팔트포장 : A=2,838㎡, 보도블럭포장(투수블럭) : A=258㎡, 보차도경계석(200x250) : L=171m, 도로경계석(100x100) : L=268m, 디자인난간(H=1.030m) : L=88경간 - 부대공 : 식재이설 : 407주, 교통표지판 및 도로반사경 : 29주, 과속방지턱 : 3개소, 휀스설치 :L=15m, 전신주이설 : 1식, CCTV설치 : 1식	자전거도로 설치 : L=409.6m(증) - 토공 : 흙쌓기(토사) : 116㎥, 터파기 : 328㎥, 되메우기 : 125㎥ - 구조물공 : 종배수관(Φ450) : 110m - 포장공 : 아스팔트포장 : A=2,838㎡, 보도블럭포장(투수블럭) : A=258㎡, 보차도경계석(200x250) : L=171m, 도로경계석(100x100) : L=268m, 디자인난간(H=1.030m) : L=88경간 - 부대공 : 식재이설 : 407주, 교통표지판 및 도로반사경 : 29주, 과속방지턱 : 3개소, 휀스설치 :L=15m, 전신주이설 : 1식, CCTV설치 : 1식
공 사 비	-		439.641천원	439.641천원
적 용 요 율	해당없음		해당없음	공사계약일반조건제21조 규정 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제21조 제2,3,4항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 기 조성된 중랑천 자전거도로와 중랑물재생센터 시설현대화 자전거도로를 연결하여 중랑천 자전거도로 이용객과 지역주민의 중랑물재생센터로의 원활한 진입로 확보로 중랑물재생센터 시설현대화와 재사용플라자 사업과 연계로 사업효과 극대화 및 시민이용 활성화를 하는데 그 목적이 있다
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 ☑ 미이행

□ 관련문서

- 자전거도로 설치공사에 대한 검토보고 승인(도시기반시설본부-16-8031)