【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 담당 김학지		요청일		2016년 월 일
공 사 명	경춘철교 정비공사
공사개요	공사규모		복합소재 바닥판 : 955M2, Rolled Beam : 93.626Ton, 엘리베이터 2개동
	공사기간		2015 . 01 . 06 ~2016 . 5 . 23
	감 리 사		(주)선진엔지니어링건축사사무소
	설 계 사		(주)동일기술공사
	시 공 사		대흥토건주식회사
자문 안건명			배수시설 변경				요청금액		153,888천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 교량의 종횡구배가 없어 교량상부의 우수가 체수 될수 있어, 이를 보완코져 난간측면에 트렌치 설치(L=354m), 하부배수관 확대(Φ100mm→Φ150mm)를 하고자함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 원활한 배수 및 구조체의 유지관리와 품질확보를 위한 강재형식의 트렌치 설치(L=354m), 배수관 규격 확대(Φ100mm→Φ150mm)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - - ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 배수시설 1식 - 변 경 : 배수시설 1식 - 증 감 : 없음					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 108,563천원 - 변 경 : 262,452천원 - 증 감 : 153,888천원 ▪ 설계변경 주요 공종 -
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부 2. 원설계자 검토의견 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2016.04.01.~2016.5.20 ▪ 소요관급자재 1. 2.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	경춘철교 정비공사
계약금액	3,922,710 천원	계약일	2014.12.29	시공사	대흥토건주식회사
공사기간	2015. 01. 06 ~2016. 5.23	낙찰율	86.758%	설계자	(주)동일기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리자	(주)선진엔지니어링 건축사사무소
공사규모	복합소재 바닥판 : 955M2, Rolled Beam : 93.626Ton, 엘리베이터 2개동			※ 작성자 : 업무담당(☎ )

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	배수설치 : 집수구 형식, 배수관Φ=100mm		배수설치 : 트렌치 설치, 배수관Φ=150mm
공 사 비	108,563천원		262,452천원	(증)153,888천원
적 용 요 율	낙찰율 86.758%		낙찰율 86.758%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약 일반조건제19조(설계변경), 20조(설계변경으로 인한 계약금액조정),
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	내용 : 교량의 종횡구배가 없어 교량상부의 우수가 체수 될수 있어, 이를 보완코져 난간측면에 트렌치 설치(L=354m), 하부배수관 확대(Φ100mm→Φ150mm)를 하고자함
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 방재시설부-2693(2016.2.29)