설 계 변 경  사 유 서

Ⅰ		용 역 현 황

□ 사업명 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

□ 사업현황(측량 및 편집 : 434㎞, 3,242,300천원)

구 분		서북지역	서남지역	동남지역
용역내용		측량 및 편집 : 162㎞ (신설43㎞,기존119㎞)	측량 및 편집 : 121㎞ (신설39㎞,기존82㎞)	측량 및 편집 : 151㎞ (신설51㎞,기존100㎞)
용역기간	총차분	’17. 2. 23. ～ ’18. 6. 30.
	2차분	’18. 1. 1. ～ ’18. 6. 30.
용역비	총차분	1,188,800천원	943,500천원	1,110,000천원
	2차분	107,200천원	85,850천원	102,000천원
사 업 자		㈜신한항업 외 2 [㈜아세아항측, ㈜동광지엔티]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	새한항업㈜ 외 2 [㈜범아엔지니어링, ㈜한국에스지티]]
해당사업소		중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

Ⅱ		설계변경 사유

□ 사유

○ 「2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」의 발주 권역 증대 및 용역 물량 확대에 따른 발주 지연으로 준공기한 연기

(공간정보과-2353, 2018.3.29.)

○ 준공기한 연기에 따른 시행 물량 증가(신규관로 및 누수복구 현장 대응)로 설계변경 시행

□ 권역별 주요 변경 내용

서   북   지   역

○ 주요 공종 물량 변경

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	9.00	9.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	42.50	50.70	증 8.2
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	118.80	118.80	-
지하시설물도 정위치 편집	㎞	161.30	169.50	증 8.2
누수복구 현장 대응	건	76.00	113.00	증 12.0

○ 설계변경 금액(용역비) : 증)64,600,000원

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
당 초	1,188,800,000	1,081,600,000	107,200,000
변 경	1,253,400,000	1,081,600,000	171,800,000
증 감	증64,600,000	-	증64,600,000

서   남   지   역

○ 주요 공종 물량 변경

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	7.00	7.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	38.70	43.80	증 5.1
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	82.40	82.40	-
지하시설물도 정위치 편집	㎞	121.10	126.20	증 5.1
누수복구 현장 대응	건	56.00	78.00	증 22

○ 설계변경 금액(용역비) : 증)41,750,000원

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
당 초	943,500,000	857,650,000	85,850,000
변 경	985,250,000	857,650,000	127,600,000
증 감	증 41,750,000	-	증 41,750,000

동   남   지   역

○ 주요 공종 물량 변경

공 종	단위	당초	변경	증감	비고
4급 기준점 측량	점	9.00	9.00	-
신규 지하시설물 조사/탐사	㎞	51.80	59.10	증 7.3
기존 지하시설물 조사/탐사	㎞	100.10	100.10	-
지하시설물도 정위치 편집	㎞	151.90	159.2	증 7.3
누수복구 현장 대응	건	44.00	69.00	증 25

○ 설계변경 금액(용역비) : 증)56,000,000원

(단위: 원)

구 분	총 차 분	1 차 분	2 차 분	비고
당 초	1,110,000,000	1,008,000,000	102,000,000
변 경	1,166,000,000	1,008,000,000	158,000,000
증 감	증 56,000,000	-	증56,000,000

Ⅲ		설계변경 심의(검토) 내역

○ 설계변경 세부내용(물량변동) 및 사유

○ 관련규정 및 적법성 여부. 끝.