설계변경 사유서

□ 공사현황

◦ 공 사 명 : 돌곶이로 105 ~ 장위로4길 51-4구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사

◦ 공사기간 : 2018.05.04. ~ 2018.10.05.

◦ 도 급 자 : ㈜자오건설 대표 임철환

□ 설계변경사유

◦ 현장여건 변경 및 추가구간 시행에 따른 시공물량 변경

공 종	규 격	단위	시공물량				비고
			당초	변경후	증 ․ 감
					증	감
단면보수	T=30㎜	m2	1372.07	1706.92	334.85		물량변경
물돌리기 배수관설치	D=300㎜	m	908	984	76		물량변경

- 공사실정 및 낙찰차액 사용계획보고 [치수과-13068(2018.08.28.)]

◦ 폐기물 처리량 100톤 미만으로 도급처리 : 폐콘크리트 94.66톤

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
			증	감
총 공 사 비	348,582,800	399,690,000	51,167,200	60,000
도 급 비	346,582,800	397,750,000	51,167,200	-
이 전 비	2,000,000	1,940,000		60,000

2018.  9.   .

치수과장  송 기 민 (인)

성북구(분임)재무관  귀하