설 계 변 경 사 유 서

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 북악산근린공원 조성사업

○ 계약일자 : 2022. 3. 8.

○ 공사기간 : 2022. 3. 14. ~ 2022. 9. 9.

○ 도 급 비 : 653,693,130원

○ 도 급 자 : ㈜아이포조경건설 대표 박주은(☎02-6213-1395)

2. 변경사유 [관련공문 : 서울시설공단 공사감독3처-6467(2022.7.28.)호]

○ 공사 중 현장여건을 반영한 신규공종 발생, 물량 변경 (※설계변경내용 별첨)

- 철거공 : 수목제거(B30) 등 6종 물량 추가

- 식재공 : 산벚나무 등 6종 물량 감소, 산딸나무 등 9종 물량 추가

맥문동 등 2종 물량 추가, 꽃무릇 등 초화류 8종 물량 감소 등

- 시설물공: 조경석쌓기(3단쌓기, 4목) 등 11종

- 데크설치공 : 현장여건을 고려한 시공수량 조정

- 부 대 공 : 물량 조정에 따른 소운반, 기계상차 물량 조정

○ 보험료, 건설하도급수수료, 퇴직공제부금비 등 제경비 정산

3. 공사비 증감내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고(증감)
도 급 비	653,693,130	776,933,000	증 123,239,870

4. 예산과목

○ 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충, 도심공원 확충, 생활밀착형 공원

조성, 시설비및부대비, 시설비(시비, 사고이월)

2022.  7.

보 고 자    지방녹지주사보         김 남 주  (인)

확 인 자    공원녹지과장 직무대리  김 성 기  (인)