설계변경 사유서(제1차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 하수시설물 보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 종로구 관내

○ 기    간 : 2023. 4. 7. ~ 12. 30.

○ 규    모 : 하수관로 개량(D300~900mm, L=1,160m)

빗물받이 정비 68개소,  맨홀정비 69개소 등

○ 총공사비 : 금1,558,648천원
- 도급비 878,834천원, 관급비 201,299천원, 이설비 478,515천원

○ 도 급 자 : 수봉산업개발(주)  대표 이경호

□ 설계변경 사유

○ 2023년 제1회 종로구 추가경정예산 반영에 따른 정비 물량 증가

□ 주요 공종 물량변경 내용(설계변경 내역서 참조)

□ 공사금액 변경 내용

(단위 : 원)

구분	금 액 (단위 : 원)
	당 초	변 경	증·감
총공사비	1,558,648,740	2,058,648,740	증) 500,000,000
도급비	878,834,740	1,178,834,740	증) 300,000,000
관급자재비	201,299,000	301,299,000	증) 100,000,000
이설비	478,515,000	578,515,000	증) 100,000,000

2023.  6.

담당자  :   시설7급    황 재 혁  (인)

확인자  :   치수과장    이 일 환  (인)