설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 담당 이상욱

요청일

2017년 08월   일

공 사 명

서울역 7017 프로젝트 건설공사

공사개요

공사규모

- 고가도로 보수 ·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=938m

- 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m

공사기간

2016. 04. 18. ~ 2017. 10. 31.

감 리 사

㈜진우엔지니어링코리아, (주)신명건설기술공사, (주)진전기엔지니어링, 해주엔지니어링(주)

설 계 사

(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, (주)한국종합기술, (주)삼안

시 공 사

홍익산업개발(주), (주)동원개발

자문 안건명

강교 강재(Steel Plate Girder 구간) 보수·보강비 정산

요청금액

증 442,563천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : Steel Plate Girder 강재 보수보강 물량이 건설사업관리단 및 시공사의 현장조사 결과 거더부의 결손부가 당초보다 84개소 증가하였고, 거더 복부 및 단부 등 협소구간은 작업이 가능한 공법(강판보강+맛대기용접)으로 변경하여 강재 거더를 보수보강한 것에 대한 공사비 반영(정산)

원설계자 의견(요약)

○ 해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 강판보강 (0ton → 8.059ton)

- 맞대기용접 (0m → 1,783m)

- 기타공사

▪ 물량 증감내역

구 분	단위	수 량		증·감
		당초	변경
강판보강	ton	0	8.059	(증)8.059
맞대기용접	m	0	1,783	(증)1,783

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :     93,357천원

- 변 경 :    535,920천원

- 증 감 : 증 442,563천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 강판보강

- 맞대기용접

별첨서류

1. 자문요약서 1부.

2. 감리단 검토의견서 사본 1부

3. 관련공문 사본 1부

4. 실정보고서 1부

▪ 공사예정시기

′16.09~′17.05 (완료)

▪ 소요관급자재

- 대상 사업아님

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서울역 7017 프로젝트 건설공사
계약금액	25,138,300천원	계약일	2016.04.15.	시공사	홍익산업개발(주), (주)동원개발
공사기간	2016.04.18. ~ 2017.10.31.	낙찰율	80.027%	설계자	(주)종합건축사사무소 디자인캠프 문박디엠피외 2개사
계약형태	제한경쟁입찰(●),턴키( ),대안( ),총액계약( ),계속비공사(●)			감리자	㈜진우엔지니어링코리아외 3개사
공사규모	•고가도로 보수·보강, 그린웨이 조성 : B=10.3m, L=938m •바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m			※ 작성자 : 이 상 욱 (☎ 02-3708-2543)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 강판보강 (0ton) • 맞대기용접 (0m)		• 강판보강 (8.059ton) • 맞대기용접 (1,783m)	• 강판보강 (증8.059ton) • 맞대기용접 (증1,783m)
공 사 비	93,357천원		535,920천원	442,563천원
적 용 요 율	낙찰률(80.027%)		협의률(90.014%)	협의률(90.014%)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부-17-7704, ′17.08.03)
	관련규정	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약일반조건 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 2항에 해당
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	· Steel Plate Girder 강재 보수보강 물량이 건설사업관리단 및 시공사의 현장조사 결과 거더부의 결손부가 당초보다 84개소 증가하였고, 거더 복부 및 단부 등 협소구간은 작업이 가능한 공법(강판보강+맛대기용접)으로 변경하여 강재 거더를 보수보강한 것에 대한 공사비 반영(정산)
효 과	① 공기단축 ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 시공사에서 건설사업관리단에 실정보고(홍익17-183, ′17.07.13)

- 건설사업관리단에서 발주처에 실정보고(서울역(건)17-515, ′17.07.13)

- 발주처에서 실정보고 승인(도시기반시설본부-17-7704, ′17.08.03)

- 신규공종 단가협의 결과반영 실정보고(서울역(건)17-589, ′17.08.10)