2014년 설계심의 사후평가 대상

□ 4개소

연번	공사시행 현황							시공부서 (담당자및연락처)	담당팀
	공사명	공사개요	공사비 (백만원)	공사기간	시공사	'14.6.30 공정율(%)	'14.12.31 공정율(%)
1	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업1공구	L=1,908m, 차량기지=318m 개착=1,414m, 정거장=176m	159,400	09.9.~'14.9.	대우건설	55%	63%	도시철도사업부 (김정수 772-7186)	기술관리팀
2	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업2공구	L=3,233m, 터널=1,007m 개착=1,977m, 정거장=249m	150,100	09.9.~'14.9.	두산건설	62%	63%	도시철도사업부 (위성환 772-7187)	기술관리팀
3	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업3공구	L=3,171m, NATM=2,879m 개착및정거장=292m	123,200	09.9.~'14.9.	고려개발	51%	63%	도시철도사업부 (박형복 772-7179)	기술관리팀
4	우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업4공구	L=3,095m, 터널=2,858m 개착=20m, 정거장=218m	123,500	09.9.~'14.9.	포스코건설	57%	63%	도시철도사업부 (안규홍 772-7178)	기술관리팀