◉서울특별시 고시 제2017-   호

우이~신설 도시철도 민간투자사업 실시계획변경(14차) 승인(안)

우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업과 관련하여 사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조 및 제17조, 같은법 시행령 제16조에 의거 실시계획변경(14차)을 승인하고 다음과 같이 고시합니다.

2017년 1월   일

서울특별시장

1. 사업의 명칭 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

2. 사업시행자

◦ 명    칭 : 우이신설경전철주식회사

◦ 대 표 자 : 서 상 일

◦ 주    소 : 서울특별시 동대문구 신설동 101-2 경영빌딩 5층

3. 사업의 목적

◦ 서울의 대표적인 대중교통 취약지역에 신교통수단 도입

◦ 서울 동북부지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전 도모

◦ 경영효율성 제고를 위한 민간 창의성 도입 및 투자재원의 다변화

4. 사업시행지역의 위치 및 내용

◦ 위    치 : 강북구 우이동~정릉~성신여대입구~동대문구 신설동

◦ 사업규모 : 연장 11.4km, 정거장 13개소, 차량기지(종합사령실 포함) 1개소

◦ 총사업비 : 6,465억원(2006년 1월 1일 불변가격 기준)

5. 사업시행방법 : 민간투자사업(BTO방식 : Build-Transfer-Operate)

6. 실시계획변경 승인 내용

◦ 공사기간 변경 : 당초 86.5개월 → 변경 94.5개월 (8개월 연장)

- 당초 : 2009.9.15.~2016.11.30.  - 변경 : 2009.9.15.~2017.7.29.

※ 수정 공정표에 따라 연장된 공사기간을 반영

※ 운영기간 : 운영개시일로 부터 30년간(변경없음)

◦ 공사기간 연장에 따른 공정표 및 총사업비 조달계획 변경

◦ 일시사용토지 기간 변경

◦ 사업시행자 대표자 변경 : 당초  민우영 → 변경  서상일

7. 실시계획변경 승인 관련 서류 열람장소 및 기간

◦ 열람장소 : 도시기반시설본부 도시철도사업부(☎ 02-772-7161)

우이신설경전철주식회사(☎ 02-3499-5521)

◦ 열람기간 : 공사시행 기간내