붙임1

기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	하 천

건 명	선유도 보행잔교 설치 설계용역

요청기관명	한강사업본부
제출년월일	2019년 11월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 선유도 보행잔교 설치 설계용역 ○용 역 비 : 370,000천원 ○용역기간 : 2019.12 ~ 2020.10.(착수일로부터 11개월) ○용역규모 : - 선유도 보행잔교 설치 기본 및 실시설계용역 - 공모설계, 경관설계, 수리영향검토 등 ○참가자격(면허 등) 1) 국내·외 건축, 도시설계, 토목 등 관련 분야 전문가 누구나 참여 가능하며 공동으로 응모하는 경우 총 5인까지 공동응모 할 수 있다. 2) 공동으로 응모할 경우 반드시 공동응모자 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하여야 한다. 대표자는 공동응모자를 대표하여 본 설계공모 관련 문서의 제출 및 수령, 권리의 취득 및 포기 등에 관한 권한을 갖는다. 3) 당선 후 계약 시 관련 기술사, 건축사가 포함되어야 한다. 4) 외국 관련 면허 소지자 경우, 단독으로 본 공모에 참여 가능하나, 당선될 경우 관련 법령에 따라 국내 면허 소지자와 공동수급체를 구성하여야 용역 계약을 체결할 수 있다. 5) 심사위원, 기술위원, 운영위원과 그들이 속한 업체 및 기타 공모 관계자는 본 공모에 참가할 수 없다. 6) 공모에 참가하는 업체 또는 개인은 중복하여 참가할 수 없다.
자체시행 가능여부	○용역시행 목적 - 본 과업은 선유도 보행잔교 설치 기본계획 수립에 따른 효율적인 투자와 최적의 설계를 방안을 마련함으로써 하안 수직방향 강심으로 가는 보행잔교 설치 및 짧은 구간이라도 손으로 강물을 만지고 체험할 수 있는 친수시설 조성하기 위한 기본(현상공모) 및 실시설계 용역을 목적으로 하고 있음. ○ 추진근거(용역시행 방침서) - 한강프로젝트 검토결과보고(한강수상 휴식명소 설치)
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 - 해당없음 ○2030 서울생활권계획 협의 대상 - 해당없음 ○용역추진경위 - 한강에는 해외같은 관광명소화 되는 잔교가 없다. (미국 산타모니카 등) - 한강에는 물위에서 조망하고 강물을 체험하는 공간이 없다. - 한강에는 물 문화와 생태를 보여주고 체험하는 공간이 없다. - 한강에는 특색있는 관광루트의 조성이 필요하다. - 월드컵 분수를 재활용 한강 수상 갤러리로 조성 필요

과업내용

1) 과업의 위치 및 규모

- 규  모 : B=6m, L=80m(고정교(EL 5.0m, 30m)

+ 부잔교(50m))

․ 선유 보행교 주변 정비(선유도 한강공원 하류북측)

․ 선유도 보행잔교 신설

․ 주요시설 : 전망(낙조 등), 휴식·친수(놀이체험, 전시 등)

사업추진계획

(절차)

○  입    찰 : ’20. 1.

○ 계    약 : ’20. 2.

○  용역기간 : ’20. 1. ~ ’20. 10.

유사용역

자료활용계획(최근10년 이내)

해당없음

사업의 예상효과

○ 한강공원에 보행잔교 및 친수공간 등 수상 관광 명소화

하여 시민이용활성화에 기여