설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2015. 12. 30.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			설계도서 검토 결과 반영				요청금액		증)367,218천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : "남부순환로~오정대로간 도로개설공사"중 설계도서 검토의견(감리단, 시공자)에 대한 설계사의 설계도서 검토의견을 반영하여 공사의 증ㆍ감 사항을 반영함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 설계도서 검토에 대한 설계사((주)도화엔지니어링)의 배수공 변경 등의 의견을 반영함.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초 : 보완설계 내역 - 변경 : 보완설계 내역에 대한 설계도서 검토의견 반영 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 - 보완설계 1식 ○변경물량 - 배수공 변경 반영 1식(우수,횡배수,종배수관외) - 한국형 포장 변경 적용 1식 - 기타 수량오류, 폐기물 반영 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 5,691,222천원 - 변 경 : 6,058,440천원 - 증 감 : 증)367,218천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공, 배수공, 포장공, 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 10월 ~ 2015년 12월 ▪ 소요관급자재 -레미콘, VR관,흄관,철근,아스콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	10,549,300천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2015.12.30	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 업무담당 정문수 (☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 보완설계내역 1식		- 배수공 변경 반영 1식 (우수, 횡배수, 종배수관 외) - 한국형 포장 변경 적용 1식 - 기타 수량오류, 폐기물 반영 1식	증액
공 사 비	5,691,222천원		6,058,440천원	증)367,218천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약금액 조정협의 자료
설계변경 근거	방 침	업무연락전 도시기반시설본부-14-46116호(2014. 11. 28)- 실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1 - 가 – 1), 2) (설계서의 내용이 불분명, 누락, 오류, 상호 모순, 현장상태와 상이)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"중 설계도서 검토의견(감리단,시공자)에 대한 설계사의 설계도서 검토의견을 반영하여 공사의 증ㆍ감 사항을 반영함.
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행 여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 업무연락전-SMIH-13-06229호(2013.6.17)- 실정보고 요청

· 현장실정보고(설계 도서 검토 실정보고)제출 – 오정 제2014-200호(2014.9.18)

· 업무연락전 도시기반시설본부-14-46116호(2014.11.28)- 실정보고 승인알림