용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 2020년 419배수지 외 2개소 정밀안전진단 용역

2. 용역설명

○ 본 용역은 우리사업소에서 관리하는 강북구, 도봉구 관내 배수지 2개소, 아리수올림터       1개소에 대한 정밀안전진단을 시행하는 용역임.

○ 대상 시설물의 상세한 검사를 실시하여 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고        이전의 기록 상태로부터 변화를 확인하여 현재의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인함.

○ 시설물에 내재되어 있는 물리적‧기능적 결함을 조사하여 안전성을 증대시키고        보수 보강방법을 제시하여 지속적인 시설물 유지관리에 철저를 기함.

3. 대 상 :   배수지 2개소, 아리수올림터 1개소

구 분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	비고
정밀안전진단	아리수 올림터	쌍문1아리수올림터	도봉구 쌍문1동 460-19	560㎥/일	1983년
	배수지	419배수지	강북구 수유4동 산73번지 3	2,000㎥	1983년
		수유5배수지	강북구 수유5동 산127번지 1	1,200㎥	1991년

4. 용역 기간 : 착수일로부터 210일간

5. 예정공정표

추진일정 과업내용	30일							90일							150일							210일							비고
1. 현황조사 및 과업수행계획서 작성
2. 외관조사 및 시험
3. 조사자료 검토 및 분석
4. 종합적인 상태평가
5. 보고서 작성
공 정(%)	25							25							25							25
누계공정(%)	25							50							75							100