`
	『위례신도시 8호선 추가역 건설』 정보통신분야 추진계획(안)
2020. 03.
정보통신처

『위례신도시 8호선 추가역 건설』

정보통신분야 추진계획(안)

국토교통부 위례신도시 광역교통개선대책사업의 일환으로 추진하고 있는 위례신도시 8호선 추가역 건설사업에 대한 공사·물품·용역 등 정보통신분야 추진계획을 마련하여 추가역 개통에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 정보통신처-7769호(2019.12.19.) 『준공검사 결과 보고(위례신도시 8호선 추가역 건설 정보통신설비 실시설계 용역)』

□ 건축2사업소-427호(2020.1.21.) 『건축.토목 분야 착공알림(위례신도시 8호선 추가역 건설공사)』

- 공사기간 : 2020. 1. 10. ~ 2021. 7. 7. (착공일로부터 545일)

Ⅱ		설계용역 추진결과

□ 실시설계 용역 현황

업체	용역기간	금액	비고
㈜지성설계 컨설턴트	2019. 6. 4. ~ 12. 7	124,444 천원

□ 주요 설비 설계내용

설비명	주요내용 및 검토사항	비 고
광전송 설비	기존 IP-MPLS 망과 연동되도록 구성
네트워크(IPT, 인터넷) 구성	8호선 망분리 네트워크와 연동 구성
경영정보시스템(MIS)	기존 업무망 연동 구성 및 정보통신분야 설계에 반영 (공사시 전자분야 부감독 지정)
인터폰 통화설비	비상호출장치의 개별 인식이 가능하고, 역사내 타분야 통화장치를 수용할 수 있도록 구성
화상설비	『철도시설의 기술기준』 반영 및 All IP 카메라 적용
대열차공간화상설비	생산 단종으로 설계 미반영, 상·하선 승강장 전부에 모니터 8대 반영
방송설비	대합실별 스피커 회선 분리 반영
행선안내시스템	운영중인 행선안내 S/W 개량 포함
TV공시청설비	복합통신설비 제외
시각장애인 안내설비	역사 인근 전기분전반에서 전원점 인출
전원설비	8호선 개량 완료한 리튬인산 축전지로 반영
접지설비	통합접지로 전기분야에서 통신기계실 접지단자함까지 설계 반영	붙임1. 참조
출입통제설비	『철도시설의 기술기준』에 의하여 통신기계실, 전기실 만 설계 반영
종합집중관리설비(스마트스테이션 관제시스템)	설계 미반영, 8호선 전체 개량시 연동할 수 있도록 카메라 등에 표준규격 설계 반영
열차무선설비	LCX 케이블 이설 반영. 8호선 LTE-R 개량사업 시기에 따라 LTE-R 관련사항 검토 필요
실시간 모니터링 설비	설계 미반영, 소량으로 제작구매 설치 불가
역무자동설비(AFC)	전자분야에서 설계 추진
주차관제설비	고객상담실에 관리 시스템 설치
항온항습기	기계분야 설계에 스탠드형 에어컨 2대 반영
배선반	RACK 형 통합배선반으로 설계
구내통신선로	주요구간 케이블 트레이 설치
기타	본선구간 배관일체형 케이블 사용

□ 예산산출내역

□ 공사, 물품 4건, 용역 2건

구분		금액 (천원)	영세율 적용	중소기업자간 경쟁 및 직접구매대상	비고
총계		3,357,953
공사	소계	1,763,447
	- 광전송설비, 구내통신선로, 본선 광케이블 설치 등	1,763,447	○	-
	- 사업부지내 성남시 시설물 철거에 따른 신설	미정	○	-	설계변경 필요
물품	소계	1,080,383
	- 화상설비	389,400	×	○
	- 무정전전원장치, 축전지	176,183	×	○
	- 방송장치	105,600	×	○
	- 행선안내게시기	409,200	×	○
용역	소계	514,123
	- 감리	448,123	×	-
	- 열차운행정보시스템	66,000	×	-	소프트웨어

※ 금액 등은 계약심사 추진 등으로 변경될 수 있음.

※ 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)』에 따라 예정가격이 3억원 이상인 정보통신공사의 경우 직접구매 대상품목의 추정가격이 4천만원 이상인 경우 대상품목을 해당 공사의 관급자재로 설계에 반영하여 직접 구매하여야 한다.

Ⅲ		추진계획

□ 발주 및 사업관리 이원화

□ 발주 및 계약 : 정보통신처

□ 사업관리 : 정보통신2사업소

- 업무망 관련 전자분야 부감독 지정

□ 추진일정

구 분		금액 (천원)	발주계획	비 고
총계		3,357,953
공사	소계	1,763,447
	- 광전송설비, 구내통신선로, 본선 광케이블 설치 등	1,763,447	’20년 3월 중	서울시 계약심사 진행 중
	- 사업부지내 성남시 시설물 기철거에 따른 신설	미정	’20년 하반기 중 설계변경 진행 예정
물품	소계	1,080,383
	- 화상전송설비	389,400	’20년 하반기 중	중소기업간 경쟁품목으로 분리발주
	- 무정전전원장치, 축전지	176,183
	- 방송장치	105,600
	- 행선안내게시기	409,200
용역	소계	514,123
	- 감리	448,123	’20년 3월 중
	- 열차운행정보시스템	66,000	’20년 하반기 중	소프트웨어 사업으로 분리발주

Ⅳ		결론

발주 전 면밀한 검토를 하여 적정성을 확보하고 선행공정을 고려한 정보통신공사를 추진하여, 위례신도시 8호선 추가역 건설 및 개통에 만전을 기하여 시민고객의 안전한 지하철 이용 및 편의 증진에 이바지하고자 함.

붙임  전기설비기술기준의 판단기준 1부.  끝.

< 붙임 >

◉ 산업통상자원부 공고 제2019-667호

전기설비기술기준의 판단기준

제18조(접지공사의 종류)

⑥ 고압 및 특고압과 저압 전기설비의 접지극이 서로 근접하여 시설되어 있는 변전소 또는 이와 유사한 곳에서는 다음 각 호에 적합하게 공통접지공사를 할 수 있다.

1. 저압 접지극이 고압 및 특고압 접지극의 접지저항 형성영역에 완전히 포함되어 있다면 위험전압이 발생하지 않도록 이들 접지극을 상호 접속하여야 한다.

2. 제1호에 따라 접지공사를 하는 경우 고압 및 특고압계통의 지락사고로 인해 저압계통에 가해지는 상용주파 과전압은 표 18-3에서 정한 값을 초과해서는 안 된다.

3. 그 밖에 공통접지와 관련된 사항은 KS C IEC 60364-4-44 및 KS C IEC 61936-1의 10에 따른다.

⑦ ***************************************************************************************************************************************************************************************************************

⑧ 제7항의 서지보호장치(SPD)는 KS C IEC 61643-11에 적합한 것이어야 한다.